문서번호	치수과-5248		주무관			치수팀장			치수과장	도시건설국장
결재일자	2021.4.12.		이혜리			황재호			김상훈	04/12 김승수
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

- 신대방동 빗물마을 조성사업 -

준공기한 연기 및 계약변경 검토보고

2021. 04.

도 시 건 설 국

치    수    과

- 신대방동 빗물마을 조성사업 -

준공기한 연기 및 계약변경 검토보고

Ⅰ		관 련 근 거

준공기한 연기 및 계약변경 요청건 (위드제이산업 주식회사, W&J-2020-업무-1210)

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 신대방동 빗물마을 조성사업

공사기간
- 2020.10.26. ~ 2021.06.30. (총차)

- 2020.10.26. ~ 2021.04.15. (1차)

공사규모

- 빗물 침투 트렌치 L=36m, 띠녹지 조성 A=215㎡, 투수콘포장(A=34.6@),   투수블록포장(A=18.65@), 빗물저금통 및 상자텃밭 설치

도 급 비

- 총차 : 512,000천원

- 1 차 : 356,620천원

도 급 자 : ㈜위드제이산업 대표 나채오

Ⅲ		보 고 내 용

준공기한 연기 검토내용

- 동절기 굴착 통제기간(11월~2월, 4개월)공사 불가로 인한 절대공기 부족.

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간 (1차)	2020.10.26.~ 2021.04.15.(175일)	2020.10.26. ~ 2021.06.30.(251일)	증76일

- 귀책사유 : 우리구 (지체상금 미부과)

계약변경 검토내용

- 장기계속계약으로 시행중인 공사이나, 효율적 공사 시행을 위해 단년도 계약으로 변경 요청.

구 분	당 초	변 경	비 고
계약방식	장기계속계약	단년도 계약

○ 총차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증∙감
총공사비	669,000,000	669,000,000	-
도 급 비	512,000,000	512,000,000	-
관 급 비	87,311,000	87,311,000	-
이설비 등	36,689,000	36,689,000	-
폐 기 물(별도)	33,000,000	33,000,000	-

○ 1차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증∙감
총공사비	479,000,000	669,000,000	증 190,000,000
도 급 비	356,620,000	512,000,000	증 155,380,000
관 급 비	87,311,000	87,311,000	-
이설비 등	2,069,000	36,689,000	증 34,620,000
폐 기 물(별도)	33,000,000	33,000,000	-

- 1차 공사비 이월 및 금년도 예산 확보된 바 공사의 효율적 시행을 위해 준공기한 연기 시 2차 공사 별도 계약 없이 단년도 계약으로 변경

Ⅳ		조 치 계 획

상기 검토 내용이 타당한 바 준공기한 연기 및 계약변경 시행

붙임 : 준공기한연기 및 계약 변경 요청건 1부.  끝.