코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	장지 및 강일공영차고지 공공주택건설사업 전략 및 소규모환경영향평가용역 기간 연장 검토

1. 우리 공사에서 시행 중인 서울시 임대주택 8만호 건설 사업 중 장지 및 강일공영차고지 입체화사업의 환경영향평가 용역과 관련입니다.

2. 상기 2개 각 사업의 전략 및 소규모환경영향평가용역의 기간 연장을 하고자 아래와 같이 검토 보고하오니 재결하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

구분	용역명	도급자	도급액(원)	용역기간	비고
1	장지공영차고지 공공주택 건설사업 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가용역	**************** ********	***********	2019.04.05.~ 2021.04.04.
2	강일공영차고지 공공주택 건설사업 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가용역	****** ********	***********	2019.04.05.~ 2021.04.04.

나. 계약기간 변경

구분	용역명	당초	변경	비고
1	장지공영차고지 공공주택 건설사업 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가용역	2019.04.05.~ 2021.04.04.	2019.04.05.~ 2022.04.04.	12개월 연장
	강일공영차고지 공공주택 건설사업 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가용역	2019.04.05.~ 2021.04.04.	2019.04.05.~ 2022.04.04.	12개월 연장

○ 연기사유 : 주택건설사업계획승인 지연에 따른 소규모환경영향평가 작성 및 협의업무 기간 부족으로 과업기간 연장 필요 [첨부1,2 참조]

다. 계약금액 등 기타내용 변경 없음

라. 지체상금 : 미부과

마. 예산과목 : 대행.주택.건축.기타.기타제경비

붙임  1. 장지공영차고지 공공주택건설사업 용역기간 변경요청 공문 1부

2. 강일차고지 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가 과업기간 연장 1부.  끝.

부 원						도시환경부장				도시공간조성처장		03/30
		정민주						김덕근			문광만
협조자	파트장		오근우

시행			도시환경부-1135				(2021.03.30)			접수				()
방침번호
우	461-200			서울 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-7654			전송	02-3410-7596		/	osian13@i-sh.co.kr					/	부분공개(5)