투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	변경 계약 의뢰(난지물재생센터 홍보용 입간판 설치)

우리 센터“난지물재생센터 홍보용 입간판 설치”사업에 대하여 다음과 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 난지물재생센터 홍보용 입간판 설치

나. 계약기간: 2021. 4. 5. ~ 2021. 4. 30.

다. 계약업체: ******

라. 변경사유: 도로 위 고소작업으로 보다 안전한 간판 설치를 위해 인력 및 장비                    추가

마. 예산과목: 사업비용(700), 영업비용(710), 처리장비(716), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)- 센터운영

바. 변경내용

- 계약금액 (부가세 포함)

구 분	변 경 전	변 경 후	비고
총 사업비	**********	***********	증 **********
계약 기간	2021.04.05.~2021.04.30	2021.04.05.~2021.05.20	20일 연장

붙임  1. 방침서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	연윤모		시설팀장	우배용		주무관	이상목		시설보수과장	04/28 조선행
협조자	주무관	황선철
시행	시설보수과-1479	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)