위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기요청

1. 교량안전과-6191호(2018.04.10.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 『 월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역

나. 용역기간 : 2018.01.15. ~ 2018.04.14

다. 도 급 자 : 에이스톤엔지니어링(주)  대표 이영순

라. 준공기한 변경 요청내용

- 당초 : 2018.01.08. ~ 2018.04.14

- 변경 : 2018.01.08. ~ 2018.05.14

마. 귀책사유 : 발주처

바. 연기사유 : 최종보고회 자문내용 보완 및 특정공법 심의 자료 검토에 필요한 절대공기 부족

사. 예산과목

- 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	배상현		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	04/11 代박동욱
협조자
시행	교량안전과-6300	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	yamato78@seoul.go.kr	/	대시민공개