준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역

나. 계약업체 : 에이스톤엔지니어링(주)  대표 이영순

다. 계약금액 : 150,403,000원

라. 계약년월일 : 2018. 01. 08

마. 착수년월일 : 2018. 01. 15

바. 준공기한   : 2018. 04. 14

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 05. 14

나. 연기사유 귀책소재 : 발주처

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 최종 자문회의 결과 보완 및 특정공법 심의 자료 검토에

필요한 절대공기 부족

2018년 04월 11일

교량안전과장 한유석 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하