설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			시희식					요청일자			2014. 6
공 사 명			강남순환도시고속도로(4공구)건설공사										심의안건		① 공사기간 연장에 따른 관련 비목 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km ○ 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
			공사기간				2001.12.29 ~ 2016.05.19
			감 리 사				㈜서영엔지니어링
			설 계 사				㈜서영엔지니어링
			시 공 사				임광토건(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 1,011,900천원
설계변경 사유(요약) ○ 공사기간이 2001.12.29~2014.05.19에서 2001.12.29~2016.05.19로 변경이 됨에 따라 관련비목 【업무용차량(품질차량비),가설사무실 부지임대료,공사이행보증수수료,환경영향조사비,공사손해보험료】의 증액 필요
원설계자 의견(요약)
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박근우					요청일자			2014. 7
공 사 명			서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사										심의안건		② 신설교각(P2) 하부 하수Box 저촉에 따른 기초 규격 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 고가철거 및 신설 L=753m(고가설치405m, 옹벽설치: 208m,기존보수보강: 140m)
			공사기간				2011.01.06 ~ 2014.12.31
			감 리 사				(주)한국종합기술, ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소
			설 계 사				(주)동일기술공사외 1개사
			시 공 사				(주)흥화, 보훈종합건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 54,740천원
설계변경 사유(요약) ○ 신설 교각(P2) 기초 설치 위치 하부에 배수BOX가 횡단함에 따라 기초 형식변경이 불가피하며, ○ 두무개길 구간 교통정체 해소를 위한 가시설 설치규모 축소 및 신설교각(P2) 기초 확대에 따른 가시설 수량 변경, 기존 기초 철거수량 변경
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 가시설 토류판 두께(t:8cm→10cm) 변경 재검토 → 토류판 휨응력을 13.5MPa(설계-침엽수)로 적용하였으나 휨응력을 18MPa로 적용해도 안전에는 문제가 없을 것으로 보임 재검토후 반영할 것 ○ 기초 파일 매입시 기존 Box에 영향이 없도록 시공계획서 등을 다시한번 확인후 시행할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박천용					요청일자			2014. 7
공 사 명			서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사										심의안건		③ 도로안내표지판 심의결과 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 도로구조개선 L=1.35km, 지하차도 신설 L=1,075m
			공사기간				2008.3.10 ~ 2014.8.29
			감 리 사				(주)동일기술공사,(주)수성엔지니어링
			설 계 사				(주)동일기술공사,(주)수성엔지니어링
			시 공 사				중앙건설(주), 현대아산(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 131,329천원
설계변경사유(요약) ○ 도로안내표지판 관리기관(양천구청)으로부터 도로안내표지판 문안심사 자문회의 심의결과를 통보받은바, 자문회의 심의결과를 설계에 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			손준호					요청일자			2014. 7
공 사 명			신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사										심의안건		④ 신촌로 중간집하장 부재 운반비 정산
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.0m, L=471.0m 중앙승강장 4개소
			공사기간				2013. 06. 20. ~ 2014. 07. 19.(13개월)
			감 리 사				(주)동해종합기술공사, ㈜경동엔지니어링
			설 계 사				(주)신명건설기술공사, (주)도화엔지니어링
			시 공 사				에스트건설(주), ㈜준경산업개발
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 64,768천원
설계변경사유(요약) ○ 당초 아현고가 철거후 절단부재를 중간집하장으로 운반하여 처리하고자 하였으나, 폐기물 관리법등에 의거 중간 집하장 운영이 불가한 것으로 협의됨 ○ 그에 따라 조속한 철거공사 후속 공종 진행을 위하여 일부 운반한 부재의 현장으로 재반입이 불가피한 상황이며, 그에 따른 운반비용 정산
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			손준호					요청일자			2014. 7
공 사 명			마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사										심의안건		⑤ 마포로 중간집하장 부재 운반비 정산
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.0m, L=468.0m 중앙승강장 2개소
			공사기간				2013. 06. 20. ~ 2014. 07. 19.(13개월)
			감 리 사				(주)동해종합기술공사, ㈜경동엔지니어링
			설 계 사				(주)신명건설기술공사, (주)도화엔지니어링
			시 공 사				유호산업개발(주), 해마건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 92,620천원
설계변경사유(요약) ○ 당초 아현고가 철거후 절단부재를 중간집하장으로 운반하여 처리하고자 하였으나, 폐기물 관리법등에 의거 중간 집하장 운영이 불가한 것으로 협의됨 ○ 그에 따라 조속한 철거공사 후속 공종 진행을 위하여 일부 운반한 부재의 현장으로 재반입이 불가피한 상황이며, 그에 따른 운반비용 정산
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박상철					요청일자			2014. 7
공 사 명			구리암사대교 연결도로건설공사										심의안건		⑥ 암사대교 아천IC 사토운반 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 사업연장(L) = 1.88km, 폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장
			공사기간				2012.08.02 ~ 2014.12.31
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사사무소
			설 계 사				(주)경화엔지니어링
			시 공 사				㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 448,000천원
설계변경사유(요약) ○ 구리암사대교연결도로건설공사의 사토장이 당초 수도권매립지(L=58.3km)로 되어있었으나 인근 현장인 암사대교건설공사의 아천IC(L=9.0km)로 변경되어 운반단가 및 공사비 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 사토장 운반 적용단가 재검토 → 암사대교(아천IC) 운반비 검토 적용단가(p9)와 설계변경내역서상 적용단가(p17)가 상이하므로 재검토후 반영할 것(운반비 적용단가 : 1,678원(p9), 1,745원(p17)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제6차)

【2014. 8. 7(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박상철					요청일자			2014. 7
공 사 명			구리암사대교 연결도로건설공사										심의안건		⑦ 암사정수장 지장물이설비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 사업연장(L) = 1.88km, 폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장
			공사기간				2012.08.02 ~ 2014.12.31
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사사무소
			설 계 사				(주)경화엔지니어링
			시 공 사				㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 155,000천원
설계변경사유(요약) ○ 암사아리수정수센터 방호울타리 이설에 따른 관리기관 협의결과 부속시설물(보안등, CCTV, 감지센서, 케이블)을 가이설 및 공사 완료 후 본 이설토록 한 요청사항 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 부속시설물(보안등, CCTV, 감지센서, 케이블 등) 이설공사는 설비분야에 해당하므로, 적용단가 등에 대해서는 우리본부 설비부와 협의하여 반영할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원