문서번호	시설보수과-1579
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
우배용	조선행	05/07 황영일

소화조 센터돔 교체 공사 실시설계 용역 계획

2021.

서울특별시난지물재생센터

(시설보수과)

소화조 센터돔 교체 공사 실시설계 용역 계획

□ 2021년도 단위사업인 소화조 센터돔 2개소 교체사업을 위한 실시설계 용역 계획임.

▷ 장기간 사용으로 균열이 발생하고 가스 누출 현상이 있는 센터돔 교체를 위한 실시설계 용역 시행하여 사업수행에 만전을 기하고자 함.

1.		추진 근거

2021년 업무추진 계획(시설보수과-144, 2021.01.18.)

2.		용역 개요

용역명: 난지물재생센터 소화조 센터돔 교체 실시설계 용역

용역 목적: 소화조 센터돔 교체에 대한 실시설계 용역을 수행하여 단위사업 수행에 만전을 기하고자 함.

용역 내용: 소화조 센터돔 2기 교체에 대한 실시 설계

용역 기간: 계약체결일로부터 30일

소요예산: ********

예산과목: (200-230-235-401-01)자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비. ○오니처리유지보수-소화조 센터돔 교체

※ 2021년 단위 사업 책정 예산: 금100,000천원

사업위치: 슬러지 제1처리장 3-1-2지 및 제2처리장 A지 소화조센터돔

3.		설비 현황

소화조: 총11지(제1처리장: 8지, 제2처리장 3지)

구 분	규 격	수 량			소화조 설치년도	센터돔 교체
계		11지
슬러지 제1처리장	∅26m×12.5m (6,600㎥)	1단	4지	2-1-1	1994	2017년 교체
				2-1-2		2018년 교체
				3-1-1		2017년 교체
				3-1-2		2021년 교체 대상
		2단	4지	2-2-1	1994	2019년 교체
				2-2-2		2020년 교체
				3-2-1		2019년 교체
				3-2-2		2018년 교체
슬러지	∅26m×13.5m	A지			1997	2021년 교체 대상
제2처리장	(7,100㎥)	B지
		C지				2020년 교체

소화조 상부 소화조 센터돔

※ 기능: 소화조 상부에 설치되어 있으며, 소화조에서 발생한 소화가스를 포집하기 위한 가스포집관, 소화조내 슬러지 소화를 돕기 위한 가스교반 노즐 등이 부착되어 있고, 그 밖에 소화가스 안전밸브, 가스이송배관 등이 설치 되어 있음.

4.		용역 추진 계획

계약 방법: 수의계약

관련법규

- 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 나목: 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제135호, 2021. 4. 1.) 제5장 수의계약 운영요령 제3절 2. 가. 추정가격 2천만원 이하 용역의 경우 1인 견적서 제출 가능 수의계약.

수의 계약 사유: 붙임 수의계약 요청 사유서 참조

계약상대자

***********************************

***************************

*********************************************

5.		향후 계획

2021. 5.: 기술용역 타당성 심사, 용역 발주 및 계약.

2021. 6.: 사업 수행 및 용역 준공.

2021. 7.~12.: 단위사업 발주 및 사업 수행

6.		기대 효과

설비 교체를 위한 실시설계 수행으로 안정적인 사업 수행

7.		행정 사항

계약심사 : 2억원 미만의 용역으로 계약심사 제외

- 근  거 : 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조(계약심사 제외사업) 2호

일상감사 : 추정가격 2천만원 초과 1인 견적 수의계약 미해당으로 제외

- 근  거 : 서울특별시 일상감사 규정 제4조(일상감사 대상)관련 [별표1] 1의 사목

붙임	1. 과업내용서 1부.

2. 실시설계 용역 설계내역서 1부.

3. 수의계약 요청 사유서 1부.  끝.