코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역 계약변경 검토 보고[과업기간 조정]

동남권유통단지 조성공사와 관련, 「동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역」에 대하여 다음과 같이 계약변경을 시행코자합니다.

Ⅰ. 동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역

가. 용역개요

구 분	동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역
계 약 자	㈜인우
계약금액	15,152,000원
계약기간	2020.12.16. ~ 2021.04.13.

나. 계약변경 내용

- 기간 변경

구분	기간	비고
기정	2020.12.16. ~ 2021.04.13.	증) 2개월
변경	2020.12.16. ~ 2021.06.14.

다. 변경 사유

-  관리청 협의기간 일정부족에 따른 과업기간의 조정(지체상금 미부과)

붙임  공기연장공문(동남권유통단지 기반시설 설계용역) 1부.  끝.

부 원						부원				기반시설부장			도시공간조성처장		04/12
		유재훈						권오종			노병철			문광만
협조자

시행			기반시설부-1482				(2021.04.12)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-7669			전송	02-3410-7622		/	sh3704@i-sh.co.kr					/	공개