문서번호	도시철도설비부-4837
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		차량과장	도시철도설비부장
최수길		강치석	05/18 김중영
협 조

하남선(5호선 연장) 개통에 따른

운영사에 대한 시운전 지원비용 보고

2020. 05. 18.

서울특별시도시기반시설본부

[도시철도설비부]

하남선(5호선 연장) 개통에 따른

운영사에 대한 시운전 지원비용 보고

하남선(5호선 연장) 건설사업과 관련하여 개통에 따른 운영사의 사업비(기술지원인력의 인건비 및 경비 등)에 대한 시운전 지원비용 정산 내역을 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부고시 제2018-634호)

- 시설물검증시험, 영업시운전에 소요되는 비용은 철도운영자등이 협의하여 공동으로 부담한다.

○ 하남선(5호선연장) 종합시험운행 계획 보고(도시철도설비부-6456호, 2019.7.8.)

- 운영사의 시운전 참여에 따른 제반 비용 지급

○ 하남선 종합시험운행 관련 비용지급(도시철도설비부-2155호,2020.2.26.)

- 사전준비(운영준비단 TF)

- 사전점검

- 시설물검증시험

- 영업시운전

Ⅱ		추 진 현 황

○ `19.07.24         : 시험열차(신조전동차) 하남선 연장구간

○ `20.01. ~ `20.02 : 1단계 시설물검증시험

○ `20.02. ~ `20.04 : 서울교통공사 인원 충원에 따른 교육

○ `20.05. ~ `20.06 : 1단계 영업시운전 완료

○ `20. 08. 08        : 1단계 개통

○ `20.07. ~ `20.08 : 2단계 사전점검 및 기술기준 검토

○ `20.11. ~ `21.01 : 2단계 시설물 검증시험

○ `21.01.~ `21.02 : 시설물검증시험 시행

○ `21.03.27        : 2단계 개통

○ `21.04.~          : 시설물 인수인계

Ⅲ		운영사 시운전 지원비용 검토

○ 시운전비 지원비용 지급내역

일 시		시운전 기간	지급 금액	비고
합 계 액			5,033,219,730
1단계	`20.08.20	`19.10.04 ~ `20.06.30	2,591,778,640
2단계	`20.12.01	`20.07.01 ~ `18.09.30	229,913,750
	`20.12.15	`20.10.01 ~ `20.12.31	100,208,130
	`21.01.15		696,346,860
	`21.04.19	`21.01.01 ~ `21.03.31	1,339,201,930
	금회예정액	`21.04.01 ~ `21.04.30	75,770,420

○ 시운전비 금회 지급요청액 : 75,770,420원

구 분		청구 금액	지출 예정액
운영준비단TF	인건비	66,852,940	66,852,900
	경 비	2,029,300	2,029,300
합 계		68,882,240
적 용			68,882,200
부가가치세		10%	6,888,220
합 계			75,770,420

Ⅳ		예 산

○ 예    산 : 10,435백만원

○ 예산과목

- 광역교통시설 특별회계 : 광역철도건설, 광역철도건설사업, 하남선(5호선연장)광역철도건설, 시설비 및 부대비, 시설비(시운전비)

Ⅴ		행정사항

○ 서울교통공사로부터 은행 계좌에 입금요청된 바, 무통장 입금에 의거하여 비용을 지출코자 함.

따로붙임 1) 운영사 비용 청구공문 1부.

2) 관련 자료 각1부.    끝.