문서번호	녹색에너지과-14775
결재일자	2020.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	햇빛발전팀장	녹색에너지과장	대기기획관		기후환경본부장
박철현	정삼모	김호성	권민		06/04 정수용
협 조
	서부공원녹지사업소장			남길순
	시설부장			전영주

시민체감형 태양광 랜드마크 운영계획

2020. 5.

기후환경본부

(녹색에너지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

시민체감형 태양광 랜드마크 운영계획

『태양의 도시, 서울』시책의 일환으로 추진한「태양광 랜드마크」에 대해 시운전 완료하였기 시설관리기관에 인수인계 등 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ ‘22년 태양의 도시, 서울’ 종합계획(‘17.11.15, 시장방침)

○ 시민체감형 태양광 랜드마크 조성계획(‘18.8.7, 본부장방침)

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명 : 시민체감형 태양광 랜드마크 조성사업

○ 사업기간 : ’18.12.18.~ ’19.11.25.

※ 준공이후 6개월간 안정화를 위한 시운전을 시행함.

○ 사업내용

- 태양광과 LED를 결합, 눈으로 보고 즐길 수 있는 랜드마크 조성

○ 설치장소 : 2개소, 서울월드컵공원(솔라스퀘어)․뚝섬한강공원(솔라로드)

○ 총사업비 : 1,295,690천원

○ 시 공 자 : 3개 업체

- ㈜한축테크(총괄, 블록생산), ㈜피엔이이노텍(전기), ㈜아트웨어(조명, 연출)

Ⅲ		그간 추진경위

○ ’18.12.18 : 계약 체결

○ ’19. 4.11 · 6.19 : 전문가 자문회의(2회)

○ ’19.11.25 : 공사 완료

○ ’19.12 ~ ’20.5 : 시험 운영 등 시운전 실시

Ⅳ		시설개요

□ 솔라스퀘어

○ 시 설 명 : 솔라스퀘어 (Solar Square)

○ 시설위치 : 월드컵공원 별자리 광장 일대

○ 시설규모

- 면적 320m2, 지름 20.2m의 원형 광장

- 보도블록형 태양광 모듈과 LED를 결합한 태양광 미디어파사드

구 분	개당용량	수 량	시설용량	일간 전력량	비 고
태양광 블록	11.4W	1,171장	13.35kW	(생산) 46.7kWh	45백만원/kW
LED 블록	10W	2,457장	24.57kW	(소비) 24.5kWh

○ 계 통 도

□ 솔라로드

○ 시 설 명 : 솔라로드 (Solar Road)

○ 시설위치

- 뚝섬한강공원 수변무대 자전거도로 일대

○ 시설규모 : 자전거도로 250m 구간 도로선 및 보도

구 분	개당용량	수 량	시설용량	일간 전력량	비 고
태양광 블록	11.4W	288장	3.28kW	(생산) 10.51kWh
LED 블록	3W	504장	1.5kW	(소비) 6kWh

Ⅴ		운영계획

□ 대 상 : 솔라스퀘어, 솔라로드 2개 시설

□ 연출 등 운영(안)

○ (솔라스퀘어) 바닥형 미디어파사드

- 일몰 후 6회 (15분 상영→15분 대기, 6회)

- 內우주, 화원 등 패턴영상 등 총 62편의 미디어콘텐츠 표출

- 바닥 갤러리로 활용, 아마추어, 학생, 시민 전시회 등 이벤트 활용

< 솔라스퀘어 상영 예시(안)(19:00~21:45) >
·1부(19:00) : 內우주(5분) → 패턴 영상(5분) → 화원(5분) → 대기(15분) ·2부(19:30) : 內우주(5분) → 계절 영상(5분) → 화원(5분) → 대기(15분) ·3부(20:00) : 內우주(5분) → 테마 영상(5분) → 화원(5분) → 대기(15분) ·4부(20:30) : 內우주(5분) → 패턴 영상(5분) → 화원(5분) → 대기(15분) ·5부(21:00) : 內우주(5분) → 계절 영상(5분) → 화원(5분) → 대기(15분) ·6부(21:30) : 內우주(5분) → 테마 영상(5분) → 화원(5분) → 상영 종료

○ (솔라로드) 자전거도로 조명

- 연출시간 : 일몰 후 ~ 23:00까지 점등

※ 한강사업본부 및 서부공원녹지사업소에서 운영(안)을 기준하여 운영

□ 시설물 인수인계

○ 인 수 일 : ’20.6.10.(수)

○ 인수기관 : ┏ 서부공원녹지사업소(월드컵공원 솔라스퀘어)

┗ 한강사업본부(뚝섬한강공원 솔라로드)

○ 인수내역

- 태양광 · LED 블록, 분전반, 예비자재, IP 카메라 등 시설물 및 부속품 일체

- 연출 영상, 자전거도로 조명 패턴 및 드론 촬영본 등 컨텐츠 일체

- 준공도면, 운영·관리 매뉴얼, 하자보증이행증권서 등 준공서류 일체

Ⅵ		행정사항

□ 서부공원녹지사업소 요청사항 및 조치계획

< 요청사항 >

○ 뷰포인트(Veiw Point)를 위한 전망시설(단상) 설치 : 20백만원

○ 기존의 62편의 영상 외에 추가로 택스트 아트(Text Art) 등 신규 영상 제작 : 20백만원

< 조치계획 >

○ 서부공원녹지사업소에서 예산 범위내에서 설치 계획을 녹색에너지과로 제출하면 검토후 사업비(‘20년 랜드마크 조성비) 지원

※ 예산과목 : 공공시설 신재생에너지 보급-지역지원/신재생에너지 설치(자체사업)/태양광 랜드마크 조성(시설비)

붙임  1) 설치 완료 사진 1부.

2) 시연 영상(솔라스퀘어) 1부. 끝.

[붙임 1] 설치 완료 사진

□ 솔라스퀘어

< 설치사진 >

< 운영사진 >

□ 솔라로드

< 설치사진 >

< 운영사진 >