문서번호	물재생계획과-10464
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
이원영		심형보	08/14 최진석
협조
	주무관		신중선

2014년 상반기(6월말) 통수능향상 및 노후관로 정비

핵심사업 균형성과관리 실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

도시안전실

물재생계획과

2014년 상반기(6월말) 통수능향상 및 노후관로 정비

핵심사업 균형성과관리 실적 보고

통수능 향상, 노후･불량관거 정비를 통하여 시민안전과 시설물 내구연한 연장을 위한 '14년 상반기 하수관로 정비사업 추진결과를 보고하고 핵심사업 균형성과관리(BSC) 실적에 반영하고자 함.

□ 추진계획

○ '14년 계획 : 총 86건  243,837백만원

- 하수관로 종합정비사업 : 35개 배수분구 145,432백만원

□ 신규 8건 / 계속 27건

□ 공사 30건 / 설계 5건

- 하수관로 신설개량사업 : 51건 98,405백만원

□ 신규 40건 / 계속 11건

□ 공사 46건 / 설계 3건 / 설계+공사 2건

□ '14년 추진실적

○ 계획 대비 실적 : 103% (통수능 향상 106%, 노후불량관 정비 102%)

(단위 : ㎞)

구 분		계 획	실 적	추진율	비 고
합 계		60.0	62.0	103%
통수능향상	소 계	20.0	21.1	106 %
	신설개량	12.0	13.0
	종합정비	8.0	8.1
노후관 정비	종합정비	40.0	40.9	102 %

○ 월별 추진실적                                         (단위 : m)

입 력 대 상	3월	4월	5월	6월	계
	8,883	15,939	20,765	16,412	61,999
통수능 향상	2,032	5,562	6,257	7,251	21,102
노후관 정비	6,851	10,377	14,508	9,161	40,897

□ 조치의견

○ '14년 상반기 균형성과관리 핵심성과 실적입력

○ '14년 하반기 하수관로 정비사업 지속 시행 및 성과관리

붙임 2014년 3월~6월 하수관로 정비실적 4부. 끝.