하수관로 통수능 향상 및 노후관로 정비실적(3월 실적)

◯ 하수도사업특별회계로 시행중인 통수능부족 및 노후불량 하수관로 정비에 따른

3월말 기준 정비실적을 보고함

- 14.3월 정비실적 : 8,883m(누계 8,883m)

(통수능부족 2,032m + 노후불량 6,851m)

□ 하수관로 신설개량사업(통수능부족)

연번	자치구	사 업 명	사 업 개 요	연장(m)	예산액	3월	비고 (34개 지역)
	23개구	계	신규40,계속11 / 공사46,설계3,설계+공사2	23,788	98,405	1,766
1	중구	무교동 하수암거 유로변경	□2.0×1.5m,L=76m	76	2,050	10	을지로
2	용산	한강로 일대 방재시설 확충(유역분할)	□2.0×2.0m,L=162m	162	3,000	0	한강로
3	용산	이태원동 527~671번지간 하수관 개량	D=900~1,350mm, L=245m	245	750	0
4	용산	청파동 91-24~139-1 번지간 하수관 개량	D=900~□1.8×1.8m, L=260m	260	500	0
5	용산	청파동 32-1~47-2번지간 하수관 개량	D=1,200mm, L=238m	238	500	0
6	성동	행당동 138~158번지 일대 침수방지	실시설계1식,□3.0×2.0m,L=40m	40	2,200	0
7	성동	마장동 중앙선 철로 역사이폰관로 개량	▣2.5*2.0m, L=41m	41	1,300	0
8	성동	송정동 73번지 주변 침수방지	D=1,500mm, L=250m	250	600	0
9	성동	홍익동 151번지 주변 하수관 개량	D=1,500mm,L=130m	130	300	0
10	성동	성수동 구의로 하수관로 유로변경	▣2.5*2.5m, L=150m	150	1,200	0
11	동대문	청량리동 206-10~206-54간 하수관로정비	D=1,000mm,L=420m	420	1,560	0
12	성북	석관동 223~332번지 침수방지	D450~□2.0×1.2m,L=1,286m	1286	3,000	80	석관동
13	강북	송천동 473번지 주변 하수관로 확대개량	D=900mm,L=190m	190	250	0
14	도봉	도봉동 600-37~601-42번지 주변 하수관 개량	D=900~1,100mm, L=695m	695	960	0
15	은평	진관동 북한산로 하수관 개선	기본 및 실시설계비 1식	0	150	0
16	서대문	신촌 현대백화점 주변 침수해소	D1,000~1,650㎜,L=271m,□2.0×2.0m,L=292m	563	5,000	0	신촌
17	서대문	연희동 외국인학교 주변 침수방지	D=450~1,100mm, L= 431m	431	900	0
18	서대문	아현역 횡단 사각형거 확장	□3.5×2.0m, L= 99m	99	1,500	0
19	마포	연남동 487-291 주변 사각형거 구조개선	□2.0×1.5m,L=15m	15	150	0
20	양천	목3동 621-12~625-28 하수관 개량	D800~1500㎜, L=210m	210	300	0
21	양천	목동 신시가지내 오수관거 정비(10차)	D450~600㎜, L=1,150m	1150	900	0
22	양천	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	오수관정비 타당성조사 및 기본설계,L=18.5Km	0	370	0
23	강서	가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비	3□3.0m×2.5m, L=120m	120	4,000	0
24	강서	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비	2＠▣3.0m×2.5m, L=300m	300	6,773	0	강서구청
25	구로	구로2동 472번지 일대 침수방지	ㅁ2.5*2.0m, L=48m	48	1,000	0

26	금천	독산2동 381번지 주변 하수도 개량	D1000㎜, L=380m	380	500	0
27	금천	독산동 범안로 주변 하수도 개량	D1200, L=210m	210	400	0
28	영등포	양평동 77-265간 사각형거 개량	□1.5~2.0×1.5m,L=750m	750	1,400	0
29	영등포	신길동 도신로 하수관 개량	D600~1,200㎜, L=450m	450	500	0
30	영등포	영등포7가 62-3~63-2 외 1개소 하수관로 개량	D600~1,200㎜, L=1,387m	1387	1,600	0
31	영등포	신길역 주변 하수관 이설	D800, L=240m	240	1,400	0
32	동작	노량진2동 동작구청 주변일대 침수해소	D2,600㎜,L=86m,▣3.0×1.8m,L=14.3m,수문 L=4.8m	105	1,500	0
33	관악	서원동 1641-20~86-10호 외2개소 하수관 개량	D900mm,L=204m,D1000mm, L=200m	404	650	40
34	관악	은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관 개량	D900mm,L=50m, D1000mm, L=150m	200	300	60
35	관악	삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관 개량	D900mm,L=300m,D1000mm, L=125m	425	650	50
36	서초	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	▣4.0*4.0m, L=900m	900	6,000	0	내방역
37	서초	방배동 효령로 일대 하수관로 개량	D1000mm, L=450m	450	600	0
38	서초	강남역 일대 침수방지 사업	□2.5×3.5, L=100m	100	1,500	0	강남역
39	강남	삼성동 봉은사로 사각형거 신설	□2.0×3.0, L=786m	786	4,821	0	선릉역
40	강남	청담동사거리 주변외 3개소 하수관로 정비	D700~1200㎜,589m,▣3.0×2.0m, L=10m	599	1,900	0
41	송파	신천펌프장 유입관거 개량	□1.5×1.5,L=170m,□2.5×2.0 L=430m	600	2,000	45	신천지역
42	송파	잠실펌프장 유입관거 개량	□1.5×1.5 L=235m	235	1,541	55
43	송파	풍납펌프장 유입관거 개량	D600~▣1.5×1.5m, L=1,898m	1,898	4,700	150	풍납지역
44	송파	문정동 105~111-9간 외 1개소 하수관개량	D900~1000mm, L=350m	350	600	0
45	송파	문정동 54번지 주변 외 1개소 하수관개량	D1200mm, L=500m	500	500	0
46	강동	암사역 주변 침수해소	기본 및 실실설계용역 1식	0	1,100	0	암사역
47	강동	둔촌로 일대 하수관로 신설	▣3.0×2.0×2련, L=600m	600	6,000	0	길동
48	서울시	자치구 지선관거 보조사업	25개 자치구 지원	4,000	11,000	1,276
49	서울시	하수시설물 긴급복구 및 정비	25개 자치구 지원	1,100	3,000
50	서울시	빗물유입시설확충	25개 자치구 지원	0	5,000
51	서울시	하수도 개량사업 시설부대비	1식	0	30

□ 배수분구 종합정비사업 3월 정비실적

(단위 : km, m, 백만원)

연번	배수분구	구 명	사업기간	서울시 관리지표
				총차계획		14년도 노후불량(m)		14년 통수능부족(m)
				총연장(km)	총사업비	계획연장	실적	계획연장	실적
합 계				1061.6	1,450,728	63,986	6,851	16,642	266
1	가회	종로	′07~′14	29.8	34,499	1,402	664	-	0
2	필동	중구	′11~′16	19.5	38,880	2,155	360	885	0
3	성수2	광진	′07~′16	33.3	58,092	2,127	704	750	0
4	구의	광진	′11~′18	52.3	64,160	3,938	362	977	74
5	장안	동대문	′07~′14	40.6	47,306	1,223	0	1,019	0
6	면목1	중랑	′07~′15	55.5	54,471	7,396	930	641	0
7	동선	성북	′11~′16	18.6	26,700	2,629	412	332	0
8	수유2	강북	′07~′16	98.5	64,359	5,190	0	508	0
9	창동2	도봉	′12~′17	16.1	23,420	1,830	144	203	0
10	공릉1	노원	′09~′15	28.3	31,101	2,462	203	687	0
11	하계	노원	′12~′18	30.1	34,800	2,521	0	976	0
12	녹번2	은평	′08~′15	28.7	39,232	2,668	0	503	0
13	구산1	은평	′10~′14	12.7	18,798	2,239	126	896	0
14	남가좌1	서대문	′09~′16	36.3	36,886	3,673	673	484	12
15	합정	마포	′09~′14	18.4	21,810	1,737	270	-	0
16	등촌1	강서	′08~′14	26.2	36,205	1,703	140	470	0
17	화곡1	강서	′10~′19	29.5	52,453	2,102	241	286	0
18	신월1	양천	′11~′18	17.3	39,374	1,111	0	433	0
19	오류1	구로	′10~′19	21.1	27,550	698	736	503	0
20	오류4	구로	′11~′17	15.8	32,617	359	0	564	0
21	오류2	구로	′12~′18	19.3	30,787	690	100	602
22	공단	금천	′09~′14	8.9	19,990	537	107	376	95
23	가리봉	금천	′10~′18	13.9	25,547	1,704	0	1,151	0
24	시흥저지	금천	′12~′16	8.9	21,583	969	0	673	0
25	도림1	영등포	′09~′18	64.5	79,998	3,568	104	-	85
		동작	12~14	8.7	9,738	1,147	0	192	0
26	신림4	관악	′12~′18	24.3	40,830	714	0	579	0
27	대림	관악	′12~′18	13.1	34,000	1,853	0	1,023	0
28	대치	강남	′10~′18	14.1	32,192	542	0	668	0
29	삼성1	강남	′11~′19	37.2	65,300	799	0	261
30	성내	강동	′10~′17	21	28,856	2,300	575	-	0
31	동교	마포	′14~′17	17	25,000
32	화곡2	강서	′14~′20	51	73,710
33	신월2	양천	′14~′19	49	69,563
34	신월3	양천	′14~′19	56	79,358
35	개봉	구로	′14~′19	34.8	41,301