품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 서울양원공공주택지구C-3BL 공공지원민간임대주택 건설공사   점검일 : 2021.6.22.~6.23.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 품질관리계획서에 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.
12.기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사계획의 실적관리가 미흡하니, 주요자재 검사가 누락되지 않도록 공장검사를 실시하고 실적관리하기 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하 물탱크실 바닥 에폭시 마감이 들뜸 및 파손이 일어나 있으므로, 기존 에폭시 철거 후 재시공 바람. ◦ 지층 천정 단열재 이음부 충진이 누락되어 있으므로, 단열재 하부 이음부 충진 조치를 바람. ◦ 지층 천정 이어치기 부위 면처리가 누락된 부분이 있으므로, 이음부위 면처리 보수조치 바람. ◦ 지하 집수정 부근 안전조치가 미흡하므로, 집수정 주변 안전띠 등으로 조치 요함. ◦ 중앙광장내 산벚나무 등 경관수목의 원활한 생육을 위하여 지반토심을 1~1.2m 확보 검토를 바람. ◦ 놀이터 바닥 고무칩 하부 콘크리트면의 배수가 원활하도록 배수시설을 보완 바람. [권장사항] ◦ 건물 외벽과 바닥 포장 경계석의 사이가 10cm 내외인 경우, 하부에 자갈(배수층)을 채우고 토심을 15cm 정도 확보하여 초화류를 식재하기 바람.
※ 본 점검결과는“서울양원공공주택지구C-3BL 공공지원민간임대주택 건설공사 시공자인 금호건설(주)과 감리자인 (주)해밀씨엠에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.