문서번호	설비부-9091
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	08/18 박기형
협조

『송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회차) 검토 보고

2014.  8. 18(월)

도시기반시설본부

(설  비  부)

『송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회차) 검토 보고

우리본부에서 시행하고 있는 송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사와 관련하여 감리원으로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회차)요청에 대한 검토 보고임.

관련근거

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 실정 보고 : 동화 C14-57호(2014.8.18.)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 같은법 시행령 제73조, 같은법 시행규칙 제72조

사업개요

○ 공 사 명 : 송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사

○ 공사규모

- 송정펌프장 : 모터펌프 900HP×2대, 수전용량 10,000KVA 증설

- 사근펌프장 : 모터펌프 1,600HP×2대, 수전용량 12,500KVA 증설

○ 공사기간 : ’13. 4. 12 ~ ’14. 12. 12

○ 시 공 사 : 이천이전력㈜

○ 감 리 사 : ㈜동화이엔씨

○ 도 급 비 : 1,377,143,992원

물가변동 조정 적용금액 적정성 검토

○ 조정요건 충족 여부

구 분	기준시점	비교시점	경과일수	지수조정율(%)	검토결과
1회	2013.3.29	2014.3.5	327일	3.10	요건충족

※ 충족 요건 : 계약일로부터 90일이 경과되고 지수조정률이 100분의 3이상 증가

○ 물가변동 조정 적용금액

순번	구 분	금 액	비 고
1	도급계약금액 (B)	1,377,143,992원
2	물가변동 적용제외 금액 (C)	649,887,876원
3	물가변동적용대가 (D)	727,256,116원	D = B - C
4	물가변동 조정율 (A)	3.10%
5	물가변동 등락금액 (E)	22,544,000원	E = A × D
6	선금급 금액	-
7	선금급 공제금액 (F)	-
8	물가변동 조정 적용금액 (G)	22,544,000원	G = E - F

※ 물가변동 적용제외 금액 : 예정공정율과 실행공정율 중 높은 공정율 적용

○ 공사비 조정 내용                                    (단위:원)

구 분	계약금액(총차)	물가변동 증액(1회)	조정 계약금액	비 고
도급비	1,377,143,992	22,544,000	1,399,687,992

○ 감리원 검토의견

- 물가변동에 따른 지수조정 검토결과 적용 기준일로부터 90일 이상 경과, 지수조정율 100분의 3이상 증가되어 물가변동으로 인한 계약금액 조정이 타당함.

조치의견

○ 본 공사의 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 관련규정에 따른 조정요건 및 조정금액 산출이 적정한 것으로 사료됨.

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정건에 대하여 감리단에 승인 통보하고 추후 설계변경시 본 계약금액 조정건을 포함하여 반영 조치하고자 함.  끝.