“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	교통행정과-11523		주무관	교통시설팀장		교통행정과장		안전교통국장
			이상원	이태호		이희현		전결 06/29 김만호
등록일자	2021.6.28.
결재일자	2021.6.29.
공개구분	부분공개(6)
			협조자

- 도로점용공사에 따른 안전하고 원활한 통행 확보를 위한-

	2021년 2차 공사중 교통소통대책 심의위원회 개최 결과

일    시 : 2021. 6. 18.(금) ~ 6. 24.(목), 5일간

심의방법 : 서면심의(비대면)

심의위원 : 교통안전국장, 교통행정과장, 건설관리과장, 도로관리과장, 전문가 4인

심의안건 및 결과

안건	공사명	주요심의결과
1	2021년 강남지사 열수송관로 공사	∘ 2, 3단계 공사 시 차로감소 구간 차로변경표시 필요 ∘ 점용으로 인한 안전문제가 발생되지 않도록 안전시설 보강 ∘ 공사 교통안내표지판 점용구간 및 운영계획에 맞게 수정할 것
2	강남지사 열수송관 개선공사	∘ 공사 시 교통안전을 위한 교통통제수 추가 배치 필요 ∘ 언주로94 공사 시 연접한 건물 진출입에 문제가 없도록 공사안내 바람 ∘ 가각부 가각정리를 통한 회전반경 및 시거 확보 필요 ∘ 7단계 공사 시 차로폭원 추가 확보 검토 및 교통처리계획 수립 필요
3	수서역세권 공공주택지구 조성공사 중 지구외 오수관로 설치공사	∘ 3단계 공사 시 교차로 내 회전차량 소통이 어려울 것으로 판단됨으로 재검토 ∘ 공사에 의한 차량진출입 불편이 없도록 폭원 확보여부 검토 ∘ 전면통제에 따른 우회로 인한 불편함이 최소화되도록 통제수, 안전표지 강화

□ 시행사 심의보완보고서 검토 후 가결 : 심의의결서 통보

2021. 6.

	강 남 구
(		교통행정과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• ｢도로법 시행령｣ 제54조 5항 별표 2 제4항(공사방법) 나목 • ｢서울특별시 강남구 도로점용공사장 교통소통대책에 대한 조례｣ 제3조 (적용대상) • ｢서울특별시 강남구 도로점용공사장 교통소통대책에 대한 조례｣ 제9조 (위원회 설치)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 도로공사에 따른 교통혼잡을 최소화하고 차량과 보행자의 안전하고 원활한 통행을 확보하기 위해 도로점용공사건에 대한 심의 후 결과를 보고함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ○ ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 서울시 25개 자치구 공통사항
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 도로점용공사에 따른 안전하고 원활한 통행 확보를 위한-

	2021년 2차 공사중 교통소통대책 심의위원회 개최 결과

「서울특별시 강남구 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례」에 따라 도로점용 공사에 따른 교통혼잡을 최소화하고 차량과 보행자의 안전하고 원활한 통행을 확보하기 위해 도로점용공사 건에 대한 교통소통대책 심의를 개최하고 심의결과를 통보하고자 함

1		심 의 개 요

□ 근    거

□ ｢도로법 시행령｣ 제54조 5항 별표 2 제4항(공사방법) 나목

□ ｢서울특별시 강남구 도로점용공사장 교통소통대책에 대한 조례｣ 제3조 (적용대상), 제9조 (위원회 설치)

□ 일    시 : 2021. 5. 10.(월) ~ 5. 14.(금)

□ 심의방법 : 서면심의(미참석)

□ 심의위원 : 강남구 공사중 교통소통대책위원회 위원 8명

구 분	연번	성 명	직 위	비 고
당연직	1	김 만 호	안전교통국장	위원장
	2	이 희 현	교통행정과장	위원
	3	이 재 호	건설관리과장	″
	4	이 한 규	도로관리과장	″
위원직	5	손 ***	㈜ ***엔지니어링 대표이사	″
	6	김 ***	㈜ ** 대표	″
	8	정 ***	****ENG 소장	″
	9	안 ***	**이엔지 상무이사	″

2		심 의 결 과

안건	공사명		대상도로	공사기간	평가기관	시행자
1	2021년 강남지사 열수송관로 공사		양재대로	2021년 7월 5일 ~2021년 7월 28일 (약 18일)	㈜파이카 이엔씨	한국 지역 난방 공사
공사내용		열수송관로 공사, 도로복구(당일복구)

□ 손** 위원

○ 1단계 공사 시 양재IC에서 송파역 방면 라바콘은 공사점용구간 끝단부에 맞추어

설치하여, 차량 및 공사구간 충돌을 방지할 것

○ 3단계 공사 시 차로감소 구간은 차로변경표시를 설치 할 것

○ 남부순환로에서 양재대로로 진입하는 차량들을 위한 공사안내표지판 설치 필요

□ 김** 위원

○ 2단계 공사시행 시 차로변경 노면표시를 추가 설치할 것

○ 운전자가 공사를 인지할 수 있도록 증분대상 공사안내표지판을 추가 설치할 것

○ 5단계 공사시행 시 교통안내표지판은 공사점용구간 및 차로운영계획에 맞게

수정할 것

□ 정** 위원

○ 3단계 주간시간대 1개차로 점용으로 인한 안전문제가 발생되지 않도록 교통안전

시설 보강바람

○ 5단계 공사 시 동부간선도로 접속구간 2개차로 변경에 따른 안전대책 강구바람

□ 안** 위원

○ 차로축소 시 차로변경 노면마킹을 설치할 것

안건	공사명		대상도로	공사기간	평가기관	시행자
2	강남지사 열수송관 개선공사		언주로94길 남부순환로394길	언주로94길 2021년 7월 5일 ~ 8월 22일(50일) 남부순환로394길 2021년 8월 1일 ~ 10월 31일(92일)	㈜파이카 이엔씨	한국 지역 난방 공사
공사내용		열수송관로 공사, 도로복구(당일복구)

① 언주로94길 구간

□ 손** 위원

○ 2단계 선릉로93길 방면 진출입 차량을 위한 교통통제수 추가 배치

○ 3단계 테헤란로43길 방면 차량을 위한 교통통제수 추가 배치

○ 공사시행으로 영향을 받는 선릉로93길 테헤란로43길상 운전자가 공사를 전에

인지 할 수 있도록 공사안내표지판을 설치 할 것

□ 김** 위원

○ 2, 3단계 공사시행시 언주로94길 외 인접가로에 대한 교통처리계획 수립 필요

○ 2단계 공사시행시 공사구간 북측에 접한 횡단보도는 휀스로 인한 보행자 시야

확보가 어려울 것으로 보여 보행자 안전대책 필요

□ 정** 위원

○ 언주로94길 공사시 보행자 통행 안전을 위해 보행안전도우미를 추가 배치바람

○ 언주로94길 공사시 연접한 건물주차장 차량진출입에 문제가 없도록 공사안내

및 우회처리바람

② 남부순환로394길 구간

□ 손** 위원

○ 1단계 공사시 버스의 급격한 차선변경으로 인한 사고방지를 위해서 버스정류장

위치 이동 가능 여부 검토

○ 안전휀스 가각부는 가각정리를 통해 회전반경 및 시거를 확보 할 것

○ 7단계 공사시 안전지대측으로 점용공간을 추가 확보에 따른 양재역에서 한티역

방면 차로폭원을 추가로 확보 할 수 있는지 검토 할 것

□ 김** 위원

○ 교호통행시 교통통제수는 공사점용구간 시·종점구간 양측에 모두 배치 할 것

○ 7단계 한티역에서 양재역 방면 직진 차량의 동선을 고려한 교통처리계획 수립 필요

○ 8단계 공사시행시 야간공사임을 고려하여 교통통제수를 추가 배치 할 것

○ 공사점용구간 가각부 정리를 통한 회전반경 확보 필요

□ 정** 위원

○ 남부순환로394길 공사로 인한 주변민원 발생을 고려하여 공사시간대 조정검토바람

○ 남부순환로394길 공사구간 인근 초등학교가 위치하여 보행안전이 우려되므로

보행안전 대책을 강구바람

□ 안** 위원

○  1단계 공사 시남부순환로의 차로가 4→2차로로 축소되므로 이에 대한 영향

분석 수록

안건	공사명		대상도로	공사기간	평가기관	시행자
3	수서역세권 공공주택지구 조성공사 중 지구외 오수관로 설치공사		밤고개로5길 및 광평로60길	2021년 7월 19일 ~2021년 11월 1일 (약 87일)	진수 엔지니어링	LH 공사
공사내용		지구외 차집관로(오수공) 설치 공사

□ 손** 위원

○ 오수관로 3단계 공사 시, 교차로 내 공사로 인한 회전차량 소통이 어려울 것으로

판단되므로 점용구간에 대한 재검토 바람

○ 5단계, 6단계 공사를 통합해서 진행하여도 양방향 진행에 문제가 없고 공사일

수도 줄일 수 있을 것으로 판단되므로 단계 및 공사기간을 줄일 수 있는 방안을

재검토 바람

□ 김** 위원

○ 3단계 공사 진행 시 수서승무사업소 방향 진출입차량 및 광평교 방향 직진차량의

원활한 소통을 위한 점용구간 위치 재검토 할 것

○ 9단계 공사 시 하니움아파트 차량 출입구는 반폭공사를 진행하는 것으로 판단

되어지나, 진출입이 가능하도록 재검토 할 것

○ 13단계 개착 전진공사 시 광평로60길변 하니움아파트 및 강남세움장애인 통합

지원센터 차량 진출입구에 대한 공사 방법을 제시할 것

□ 정** 위원

○ 14단계공사시 광명로60길 일부구간 전면통제로 우회로 인한 불편함이 최소화

되도록 광평로 및 밤고개로5길의 우회안내를 강화하고 필요시 사전에 통제수

추가배치바람

□ 안** 위원

○ 각 단계별로 차로축소시 차로변경, 진행방향 안내 등 적정 노면마킹을 계획할 것

○ 3단계 공사 시 6개의 차로군 중 5개의 차로군이 교차로 동남측코너(폭3m)를

통해 교차로를 통과해야 하나, 폭원협소 및 시거미확보 등 사고위험과 통행불편이

매우 클 것으로 예상되므로 개선방안을 강구할 것

○ 9,10단계 공사 시 인근시설의 차량진출입구앞 공사로 차량진출입에 불편이 없도록

적정폭원 확보여부 등을 검토할 것

○ 12단계 공사 시 차로폭원이 2.6m로 협소하게 설치되어 이용자들의 불편이

예상되므로, SB우회전시 불편이 없도록 회전부를 확폭하고, 점용시간 주차금지된

거주차 주차면 공간을 활용하여 차로폭을 최대한 확폭할 것

○ 13,15단계 교통안내표지중 북측부 표지판상 공사지점 위치가 잘못 표기되어

있으므로 수정할 것

3		향 후 계 획

□ 2021. 6. 28.           심의 결과 통보

□ 2021. 6. 28.~30.     시행사 심의보완보고서 제출

□ 2021. 6. 30.~ 7. 2.  심의위원 보완보고서 검토 후 가결 결정

□ 2021. 7. 2.            심의의결서 통보

4		행 정 사 항

□ 교통소통대책 심의위원(위원직) 서면심의 수당 지급

□ 서면심의수당 : 70,000원 × 4명(위원직) = 280,000원

- 강남구 세출예산 집행지침 정비결과(위원회 운영수당) 안내 기획예산과-3134(2021.3.12.)호

□ 예 산 과 목  : 교통행정과, 선진 교통체계 확충 및 정비, 주차난 해소대책 및 교통시설 개선, 이면도로 교통 및 보행환경 개선사업, 일반운영비, 사무관리비

붙임   1. 2021년 강남지사 열수송관로 공사 교통소통대책 심의결과 1부

2. 강남지사 열수송관 개선공사 교통소통대책 심의결과 1부

3. 수서역세권 공공주택지구 조성공사 지구외 오수관로 설치공사 교통소통대책 심의결과 1부