주요 심사내용

□ 공 사 명: 묵동천 동네하천 재탄생 정비공사

□ 사업개요

위 치	노원구 묵동천
공사개요	- 산책로 및 휴게공간 정비 L=1.5km - 횡단교량 및 체육시설 등 편의시설물 설치 등
공사기간	2021. 3. ~ 9.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,080,394	천원
○	심사금액	:	908,400	천원
○	조 정 액	:	171,994	천원
○	조 정 율	:	15.9	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정(감6,407천원)

- 각재: 406,585원/㎥ → 365,375원/㎥

- 혼합골재: 24,000원/㎥ → 20,000원/㎥

- 광명단페인트(1종3류): 8,505원/ℓ → 7,490원/ℓ

- 결속선: 1,980원/kg → 1,190원/kg 등 11종 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘크리트 포장: 품셈기준 조정(토목 1-6-2) (감106,484천원)

- 레디믹스트콘크리트 타설: 품셈기준 조정(공통 6-1-1) (감622천원)

- 운반비: 경비 적용 (감27,635천원)

- 합판거푸집: 품셈기준 조정(공통 6-3-1) (감4,225천원)

- 잡석걷기: 기계 100% 조정 (감6,926천원)

- 터파기: 기계 100% 조정 (감2,029천원)

- 되메우고 다짐: 기계 100% 조정 (감483천원)

- 현장내 잔토처리: 기계 100% 조정 (감996천원)

- 콘크리트 표면강화코팅: 품셈기준 조정(건축 11-2-3) (감16,012천원)

- 공구손료: 재료비 적용 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상: 심의완료

- 특별시방서 보완발주

: 평탄화 장치(특허) 시공방법 기술(솔모양 디자인 연출 방법 상세 명기)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 이전비, 관급자재비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비 중 사회보험료, 고용개선장려금은 관련 조례 개정 시 반영 필요