준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 :  2014년 특별도로교통안전진단 및 실시설계용역(1차)

나. 계약업체 : 도로교통공단 서울특별시지부 대표 장광

다. 계약금액: 금21,850,000원(일금이천일백팔십오만원정)

라. 계약년월일 : 2014. 6. 11

마. 착수년월일 : 2014. 6. 11

바. 준공기한 :  2014. 8. 29

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 10. 29

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

◦ 교통안전시설 심의 등 유관기관 협의기간 소요에 따른 절대용역기간 부족

2014년   8월    일

교통운영과  강 진 동(인)

서울특별시(분임)경리관 귀하