문서번호	공원운영과-11840
결재일자	2021. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
윤정민	이재이	유병오	09/17 박미애
협 조

보라매근린공원 조성계획 결정(변경) 추진계획

2021. 9.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

보라매근린공원 조성계획 결정(변경) 추진계획

보라매공원 내 발달장애인복지관 건립사업에 따른 공원조성계획을 변경하고자 함.

□ 추진배경

○ 보라매근린공원 조성계획 변경요청[장애인자립지원과-16688호(2021.9.15)〕

	발달장애인복지관 건립 사업개요
○ 사 업 명: 시립발달장애인복지관 별관 건립 ○ 위 치: 동작구 여의대방로20나길 39(보라매공원 내) **************************** *********************** ************************************ - 기존 별관(식당 및 다목적강당) 철거 후 지하1층~지상4층 규모로 증축 ○ 설계용역사 : ㈜SNB건축사사무소 외2 ○ 추진경위 - ’20.09.11. : 시립발달장애인복지관 증축계획 수립(장애인자립지원과) - ’20.09. ~ 10. : 서울시 투자심사(재정균형발전담당관) - ’20.12. ~ ’21.01. : 공유재산 심의(자산관리과) - ’21.02. ~ 03. : 공공건축 심의(도시공간개선단) - ’21.05. ~ 07. : 설계공모 추진(도시공간개선단) - ’21.09. ~ ’22.04. : 설계용역 추진(도시기반시설본부) ○ 향후계획 - ’22.05. ~ ’23.05. : 공사추진 - ’23.07. : 개관

□ 보라매근린공원 현황

○ 위    치 : 동작구 신대방동 722 일대

○ 면    적 : 413,352㎡

○ 공원결정 : (최초)1986.06.20.(건설부 고시 제1986-267호)

○ 조성계획 : (최종)2020.07.02.(서울시 고시 제2020-277호)

□ 공원조성계획 변경사항

○ 주요내용: 시립발달장애인복지관 건축면적 및 시설면적 증가 등

구분	시설명	당초	변경	증감	증감사항
교양 시설	********	**********	**********	*********	********************** ************************** ****************************** *************************** ******************************
	*** *** ****** **	*	******	* ******	****************************************************
조경시설	**** ****** **	******	*	********	********************
녹지및기타	**	***********	***********	***********

○ 법정사항

구 분	변경전	변경후	증감사항	법적사항
시설률	******	******	*******	법정 40% 이하
건폐율	*****	*****	*******	법정 10% 이내

□ 추진일정

○ ’21.  9. 23. : 공원조성계획 결정(변경) 열람공고 및 유관부서 협의

○ ’21. 10.  4. : 도시공원위원회 상정요청

○ ’21. 10. 21. : 도시공원위원회 심의

○ ’21. 11. 20. : 공원조성계획결정(변경) 고시 요청(→공원조성과)

□ 검토의견

○ 시립발달장애인복지관(1986년 개관)의 노후된 시설 및 증가된 수요로 인한 불편사항을 개선코자 별관을 철거 후 증축하는 사항으로,

○ 발달장애인복지관 부지 내 주차장 등 기존 시설 및 에어파크 내 전시용 비행기 등의 현황 반영을 포함하여 공원조성계획을 변경하고자 함.

붙임  1. 열람공고문(안)  1부.

2. 공원조성계획조서 1부.

3. 공원조성계획도면(별도첨부) 1부.  끝.