코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	3차 변경계약 의뢰(서남·탄천물재생센터 태양광 설치 구조안전검토용역)

1. 녹색에너지과-24144호('21. 10. 25.) 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 「서남·탄천물재생센터 태양광 설치사업」구조안전검토 용역의 3차 변경계약을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 사 업 명 : 서남·탄천물재생센터 태양광 설치 사업(환경부 국비 보조사업)

- 용 역 명 : 서울물재생시설공단 태양광 발전설비 설치공사 건축물 구조안전검토 용역

- 계약기간 : *********************************

- 계약금액 : ************

- 계약업체 : **********

나. 용역변경

- 변경내용 : 계약기간 연장

구 분	변경 전	변경 후	증감	비고
준공기한	************	************	*****	*********

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

- 변경사유 : 설치 예정지 구조검토결과 누수(서남 유입펌프동) 및 구조보강의견(서남 송풍기동)으로 설치 위치 재조정에 따른 구조안전검토 기간 연장 필요

붙임 1. 관련 방침서 1부

2. 준공기간 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	양진혁		햇빛발전팀장	정삼모		녹색에너지과장	10/25 문인기
협조자	계약1팀장	원종순
시행	녹색에너지과-24197	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3562	/전송		/		/	부분공개(5)