문서번호	토목부-16700
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
박천용	최광무	08/28 노우성

준공기한연기 검토보고(전체 및 제7차)

(서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사)

2014. 8.

서울특별시도시기반시설본부

( 토 목 부 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

준공기한연기 검토보고(전체 및 제7차)

(서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사)

본 공사에 대한 지장물 이설 지연과, 유지관리부서 및 인근 주민들의 추가 요구사항(안전휀스 등)을 이행하기 위해서는 추가 공사 기간이 필요하여 전체 공사 및 7차 공사의 준공기한을 연기코자 검토보고 하는 사항임.

관련근거

○ 서지(감)제14-412호(‘14.08.27.) : 전체 및 7차 공사 준공기한 연장요청

공사개요

○ 위    치 : 양천구 신정3동 735-5 남부순환로 서부트럭터미널 앞

○ 사업규모 : 지하차도 건설 연장 1,075m, 폭 18.5m

○ 공사기간 : 전 체 ‘08. 3.10 ~ ’14. 8.29(제7차 : ‘13.10. 8 ~ ’14. 8.29)

○ 총사업비 : 81,994,000,000원

○ 도 급 액 : 전체분 68,862,922,280원, 7차분 8,334,922,280원

○ 시 공 사 : 중앙건설(주), 현대아산(주)

○ 감 리 사 : (주)동일기술공사, 수성엔지니어링

공정추진 현황

2014. 8.22.현재

구 분	계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)	비 고
전체공사	99.997	99.101	99.10
7차공사	99.996	92.573	92.58

준공기한 연장 검토

○ 준공기한 연장 요청

구 분	당 초	변 경	공기연장 요청일수	비고
전체공사	2008.03.10~2014.08.29 (2,364일)	2008.03.10.~2014.10.15 (2,411일)	47일
7차공사	2013.10.08~2014.08.29 (326일)	2013.10.08.~2014.10.15 (373일)	47일

○ 준공기한 연장 요청 사유

- 지장물 이설 지연과, 유지관리부서 추가 요구사항, 민원 추가 요구사항 등 반영에 따른 추가공사 시행 및 설계변경으로 도로 및 포장공(보도공, 포장공 등), 조경공, 전기실 출입건물 등 잔여공사 공정지연

- 추가 요구사항 반영에 따른 현장 실정보고 및 설계변경 등 공사기간 연기 필요

○ 추가(요구)사항 및 조치계획

구 분	요구기관	추가 요구사항	조치 계획	조치 예정일
지장물 이설 지연	시공사	- 한전주, 통신주, 가로등,신호등, CCTV 등 지장물 이설 요청 토목부-15682(2014.8.12)	- 유관기관 지장물(한전주,통신주, 가로등 등) 이설 및 보도정비 완료 예정	9.15
유지관리부서	양천구청	- 시점부 가로수 이팝나무 3주 추가 식재 요청 방재시설부-7813(2014.8.20)	- 시점부 가로수를 추가 식재한 이후, 보도블럭 재시공 완료 예정	9.15
유지관리부서	강서도로 사업소	- 제어실 지상 출입구 설치시 기존 지하차도 출입구 참조하여 시공 요청 강서도로사업소 기전과-10464(2014.8.19)	- 콘크리트타설 등 구조물공사와 출입문 및 갤러리, 내벽 페인트 및 외벽마감 등 건축공사를 시행하여 제어실 지상 출입건물 신설 완료 예정	9.21
민원	벽산아파트	- 205동 옹벽부분 상단에 신규 휀스 설치 요청(안전사고 우려) 블루밍제7-23-2호(2014.7.23)	- 205동 옹벽부분 상단에 메쉬휀스를 설치하는 것으로 벽산아파트와 협의되어, 시공예정	9.19

○ 주요공종 추진계획 : 준공(2014. 10. 15)

- 도로및포장공(포장공) : 2014년 9월 5일 완료

- 도로및포장공(보도공 등) : 2014년 9월 15일 완료

- 지하차도공(전기실 출입건물) : 2014년 9월 21일 완료

- 조경공(조경식재) : 2014년 9월 15일 완료

- 부대공 및 공사 마무리 : 2014년 10월 08일 완료

- 준공검사 준비 : 2014년 10월 15일 완료

※ 잔여공사 추진공정표

구 분			2014년																								비 고
			8월										9월										10월
			10			20				31			10			20				30			10			15
도로및 포장공	보도공
	포장공
지하차도공	전기실 출입건물
조경공	조경식재
부대공 및 공사 마무리 준공검사 준비													부대공/마무리
																							검사 준비
공정율 (%)	7차	월계	17.12										3.11										1.00
		누계	95.89										99.00										100.0

감리단 검토의견

○ 서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 시행중 지장물 이설 지연과, 유지관리부서 추가 요구사항, 민원 추가 요구사항 등으로 인하여 주요공종 추진이 지연되어 공기연장이 불가피한 것으로 사료되는 바,

○ 원활한 공사수행을 위하여 공사계약 일반조건 제8절 2. 계약기간의 연장 가항 및 나항 및 설계설명서 7 공사기간 5)에 의거 준공기한을 아래와 같이 연장함이 타당할 것으로 사료됨.

-  아        래   -

구 분	당 초		변 경		공기 연장일수	비 고
	공사기간	일 수	공사기간	일 수
전체공사	2008.03.10.~ 2014.08.29	2,364일	2008.03.10.~ 2014.10.15	2,411일	47일
7차공사	2013.10.08.~ 2014.08.29	326일	2013.10.08.~ 2014.10.15	373일	47일

조치계획

○ 감리단 검토의견대로 전체공사 및 7차공사의 준공기한을 연장하여 공사 시행함이 타당하고 사료됨.

○ 폐기물처리용역의 준공기한도 시설공사에 맞게 준공기한 연기.

○ 전면책임감리용역의 준공기한도 시설공사에 맞게 준공기한 연기.

붙임 : 1) 감리단 검토의견서 1부.

2) 유지관리부서 및 민원 추가요구 사항 1부.

3) 예정공정표(전체,제7차) 1부.  끝.