문서번호	영동대로복합개발추진단-8340
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장
정용훈		代정용훈	전결 11/15 이승석
협 조
	복합개발설비과장			곽용길
	복합개발건축과장			박병만
	복합개발토목과장			박운용

영동대로 지하공간 복합개발 실시설계단계 건설사업관리용역

과업수행 및 인력투입계획 검토 보고

2021. 11.

영동대로복합개발추진단

영동대로 지하공간 복합개발 실시설계단계 건설사업관리용역

과업수행 및 인력투입계획 검토 보고

사업계획(규모) 변경 방침에 의거 용역 재개됨에 따라 용역사업자로부터 제출된 과업수행 및 인력투입계획서에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 실시설계단계 건설사업관리

○ 과업규모 : 복합환승센터 597m(지하7층, 토공량 약200만㎡), 철도터널 403m

○ 용역기간 : 2021.06.07.~2022.11.28.(1차 : ~ 2022.6.6.)

○ 계약금액 : 2,833,580천원(1차 : 1,800백만원)

○ 계 약 자 : ㈜신성엔지니어링 외 6개사

※ 주요 과업내용

▪ 건축·시스템분야(1,2공구) 기본설계 기술제안 입찰도서 검토

▪ 토목1~4공구 및 건축·시스템분야 1·2공구 실시설계단계 건설사업관리

▸ 공구 간 실시설계 조정 및 연계성 검토, 실시설계 용역성과 검토, 예산검증 및 조정, 설계자문회의 운영·관리 업무, 일정기간 합동사무소 운영 등

□ 추진경위

○ '18.02.28	: 기본설계 용역 착수(~'21.11.18)

○ '20.12.	: 토목공사 1·3·4공구 실시설계 착수

○ '21.03.	: 토목공사 2공구 실시설계 착수

○ '21.06.07	: 실시설계단계 건설사업관리용역 계약 및 착수

○ '21.06.08	: 용역 일시중지

○ '21.10.05	: 사업계획(규모) 변경 추진계획 수립(시장방침 제61호)

○ '21.10.15	: 사업계획 변경에 따른 설계․공사 실행계획 수립

○ '21.10.25	: 용역 재개

○ '21.10.27	: 과업수행 및 인력투입계획서 제출(용역사 → 추진단)

□ 과업수행 및 인력투입계획 주요내용(붙임)

○ 주요과업 내용

- 건축․시스템분야 기본설계 기술제안 입찰도서 검토

- 토목분야 실시설계단계 건설사업관리 업무 수행

▸ 제안 실시설계 및 변경설계에 대한 적정성, 공구 간 정합성 등 검토․조정

- 건축․시스템분야 실시설계단계 건설사업관리 업무 수행

▸ 각 분야 설계 적정성, 공구 간 정합성 등 검토․조정

- 분야별 인터페이스 검토, 각종 영향평가, 인허가 등 서류 적정성 검토 등

○ 건설사업관리업무 수행절차

1. 조사업무	현장조사 및 답사, 노선 주변 현황 조사 지장물 및 구조물 조사 현황 파악, 관련 개발 계획 검토
2. 설계용역 관 리	적용된 관련계획 및 계산기준(시방서, 지침, 법규 등) 및 제․개정 사항 사전조사 및 종합계획의 적정성 등 전 단계 결과의 적정성 검토 전 단계에서 제시된 공사비 기술개발 및 신기술, 신공법 사용 적용 등에 관한 사항 기타 원활한 설계단계 건설사업관리업무의 수행을 위하여 필요한 사항
3. 설계용역 성과검토	주요 설계용역 업무에 대한 기술자문 사업기획 및 타당성조사 등 전 단계 용역 수행 내용의 검토 현장조사(측량, 현지여건, 지반상태, 재료 등) 내용의 타당성 및 조사결과에 대한 설계적용의 적정성 검토․확인 관련계획 및 계산기준(시방서, 지침, 법규 등) 적용의 적합성 검토 구조물별 구조계산의 적정여부 검토․확인 구조계산 결과 설계도면 반영의 적정성 검토․확인 시공성 및 유지관리의 용이성 검토 설계도서의 누락, 오류, 불명확한 부분에 대한 추가 및 정정 지시 및 확인 도면작성의 적정성 검토 각종 위원회 심의결과 및 관계기관 협의내용에 대한 반영여부 확인 적정 설계조직과 인원 운영 여부 확인 설계 공정의 검토․확인 시방서(일반 및 특별시방서) 작성의 적정성 검토․확인 건설사업관리 결과보고서의 작성 기타 추가업무(발주청에서 요구하는 업무)
4. 사업관리 보고서	건설사업관리보고서 기타 감리수행 기록 서류일체

**********

**************************************************

**********************************************

******************************************************

***************************************************

*********************************************************************************

<토목분야 인력투입계획>

					************
					**********
*******					****						*********					*****
**	***		*****		**	***		*****			**	***	*****			**	****
**	***										**	***
					**	***										**	***
**	***										**	***
					**	****		****								**	****		****
**	***										**	***
**	****		****								**	*****	****
******					******						******					******

□ 조치계획 : 조건부 승인 조치

○ 본 용역 「과업내용서」 “제5절 1-3)과업수행계획서 제출” 규정에 따라 제출된 과업수행계획서를 승인하고, 아래 사항을 추가(보완) 이행토록 요청하고자 함.

**************

****************************************************************

*********************************************************

***********************************************

□ 향후 계획

○ '21.11.16	: 과업수행계획서 승인(조건부) 통보(추진단 → 용역사)

○ '21.11.~	: 착수 보고 및 토목분야 건설사업관리 시행

○ '22.10.~	: 건축․시스템분야 건설사업관리 시행(예정)

따로 붙임 : 과업수행계획서 1부. 끝.