문서번호	도로보수과-7617
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최완		08/28 이석재
협조

2014년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사 작업계획(4차) 보고

북부도로사업소

[도로보수과]

2014년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사 작업계획(4차) 보고

공사현황

공 사 명 : 2014년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

공사개요 : 불량맨홀 정비 554개소

공사기간 : 2014.04.11 ~ 2015.02.28

도 급 비 : 512,794,000원

도 급 자 : 삼서건설(주) 대표 나남열

보고내용

관련근거

⇒『포장도로 평탄성확보를 위한 불량맨홀정비 추진계획보고(도로보수과-3906, 2014. 5. 9)』

불량맨홀정비 현황(2014. 8. 27일 기준)

- 1차 작업 : 완료 32개소

- 2차 작업 : 완료 176개소

- 3차 작업 : 완료 173개소, 진행중 64개소

계       완료 381개소, 진행중 64개소

금회 작업내용

- 관내 노후포장도로 정비공사시 노면단차로 매몰된 맨홀과, 민원,   간선도로상 맨홀주변 파손, 침하 등으로 평탄성 확보가 시급한 불량   맨홀에 대하여 우선 작업지시하여 차량 안전사고 예방 등 시설물    유지관리에 만전을 기하고자 함

(종로구, 성북구 관내 : 야간 작업, 강북구, 도봉구, 노원구 관내 : 주간작업   시행하고 도봉로,동일로 구간 등 주요구간은 교통여건을 감안 야간 작업)

- 불량맨홀 주변의 광범위한 파손으로 보수가 필요한 구간은 도로보수를    선행한후(자체 직영반 보수) 맨홀 정비

- 맨홀관리기관에 대하여는 현장확인 및 정비여부와 맨홀 뚜껑․받침(철개)   지원 협조요청, 정비완료후 맨홀정비비 부과예정임을 통보

※ 맨홀뚜껑 파손 및 뚜껑단차가 심하여 교체 필요시 맨홀관리기관에 지원요청

작업지시 분야별 구별 현황

구 분	계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
합 계	40	4	3	12	7	14
하수도	7	-	2	3	1	1
상수도	8	-	-	2	1	5
전 기	-	-	-	-	-	-
통 신	12	1	1	6	2	2
소화전	4	-	-	-	-	4
지역난방	9	3	-	1	3	2

조치계획

상기 보고내용과 같이 불량맨홀에 대하여 『2014년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』  업체에 작업지시(4차)하여 정비하고

⇒ 작업기간 : 2014. 9. 1 ~ 2014. 10. 10

불량맨홀정비공사 작업내용에 대하여는 향후 예산범위내에서 설계변경 및 정산처리 하고자 함.

따로붙임 : 1) 작업지시 내역 1부.

2) 위치도 및 현황사진 각 1부(별도).  끝.