문서번호	건축부-10611
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		양기정	08/29 代강성욱
협조

장충체육관 리모델링공사(총차 및 1차)

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

장충체육관 리모델링공사(총차 및 1차)

설계변경 검토 보고

「장충체육관 리모델링공사」관련  책임감리자로부터 제출된 설계변경 (내역조정) 총차 및 1차에 대한 처리 방안 보고임.

1		관련 근거

◌ JCR기술-14-50(2014.8.29.)호 실정보고(책임감리 –펨코엔지니어링건축사사무소)

◌ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정)

2		변경 내용

◌ 총사업비 : 32,612백만원

◌ 공사금액 : 총차-10,952,235천원(1차-7,519,163천원)

◌ 공사기간(총차 및 1차) : ‘12.05.30 ～’14.12.31(1차: ‘12.05.30～’14.08.31)

◌ 시 공 사 : 성지건설외 1개사

◌  감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 외 1개사

◌  설계 변경 금액 (전체)                                        (단위 : 원)

구 분	계약금액	변경내용	공사기간	비 고
총 차	14,725,920,000	내역변경	‘12.05.30～’14.08.31
1 차	7,583,997,000	내역(조정)변경	‘12.05.30～’14.08.31	공사계약 금액 변경 없음
2 차	7,141,923,000	변경없음	‘14.09.01～’14.12.31

◌ 주요변경 내용 :앵글트러스를 파이프트러스로 내역조정등(계약 금액변경 없음)

1차 계약변경(내역조정)                              (단위:원, 부가세포함)

공 종	당초금액(a)	변경금액(b)	증액(b-a)	비 고
건축공사	4,205,242,886	4,300,797,986	95,555,100	내역조정
토목공사	1,590,749,573	1,562,037,910	-28,711,663	내역조정
간접비	998,587,541	931,744,104	-66,843,437	내역조정
폐유처리비	19,962,727	19,962,727	-	변경없음
설계변경 용역비	80,000,000	80,000,000	-	변경없음
부가세	689,454,273	689,454,273	-	변경없음
합 계	7,583,997,000	7,583,997,000	-	변경없음

- 보험료 등 간접비는 1차공사시 실제사용된 사항을 내역으로 계산함(간접비 감액)

◌ 2차공사 진행 사항

- 2014.7.25. 2차공사에 대한 변경 실정보고 (행제제1부시장 방침에대한 설계변경)

- 2014.7.26. 계약심사 의뢰 (계약금액의 증액이 총공사비의 10%이상)

- 2014.8.21. 계약심사완료  (계약심사과 통보)

- 2014.8.26  2차공사검토보고 및 공사발주 , 재무과 계약의뢰

- 2014.8.27.  2차공사발주분 계약

3		책임 감리 검토 의견

◌  실정보고 검토 결과 설계변경하는 것이 적정한 것으로 사료됨

4		처리 방안

◌ 책임감리자의 설계변경 검토건에 대하여 그 결과를 반영하여 총차 및 1차  설계변경을 진행(재무과 계약변경 의뢰) 하고자 함.

따로붙임 : 1.  책임감리 실정보고서

2.  총차 및 1차수 내역서.  끝.