투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(차집관로시설물유지보수공사-레미콘)

1. 물재생과-1526(2014.05.12.)호 및 물재생과-2363(2014.06.13.)호 관련입니다.

2.『2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』관급자재 조달구매 계약건에 대하여 소요물량 증가로 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재구매(차집관거시설물유지보수공사-레미콘)

나. 계 약 일 : 2014년 05월 14일

다. 계약금액 : 금12,220,200원(금일천일백구십삼만사천원)

(조달수수료 별도 : 금62,680원)

라. 납품기한 : 2014년 12월20일

마. 계약방법 : 조달3자단가

바. 계약업체 : 서울경인레미콘공업(협)

사. 변경 내역

구 분	품 명 (규 격)	단 가	수 량 (㎥)	금 액	비 고
당 초	레미콘 (25-21-08)	59,670원	20	1,193,400원
당 초	레미콘 (25-21-12)	61,260원	180	11,026,800원	소요물량증가
변경후	레미콘 (25-21-12)	62,560원	380	23,772,800원

아. 변경사유 : 소요물량 증가

사. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리,중랑물재생시설운영,공통분야유지보수,시설비 및

부대비,시설비(차집관거준설및유지관리) 끝.

	물재생과장
주무관	차성민		★주무관	남경극		물재생과장	09/02 강병수
협조자	주무관	김근수
시행	물재생과-4419	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개