문서번호	교통운영과-17382
결재일자	2018.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
백바름		김옥희	10/15 강진동
협조

2018년 제16차 도로점용공사장

교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

교 통 운 영 과

2018년 제16차 도로점용공사장

교통소통대책 자문회의 결과 보고

2018년 10월 12일(금) 제16차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2018. 10. 12(금) 15:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

○ 참석위원 : 10명 (위촉직 : 9명, 간사 : 1명)

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 이경아 위원, 김정환 위원, 고진영 위원, 김은경 위원, 박규영 위원, 홍지연 위원, 박종란 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

※ 위원장 부재로 인해 관련 조례 제9조에 따라 외부위원(위촉직) 호선으로 부위원장(이동원 위원)이 진행함

○ 자문대상 및 결과 : 총 2건 (조건부 시행 : 2건)

□ 자문안건(1) : 북악산로 도로다이어트사업 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
북악산로	2018.10.27.∼ 2018.12.02	전 일	1∼2개 차로	성북구 교통행정과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 가도색 공사단계에 대한 내용을 추가하기 바라며, L형 측구 및 보도확장 공사 관련하여 양생기간 등을 고려해 공정을 재검토하기 바람

- 6단계 성신여대→아리랑고개 방향 정체를 고려하여 점용구간을 삭제하고, 교통통제수를 통해 주변 안전을 확보하기 바람

- 9단계 보도 선시공 관련하여 점용구간 반폭시공 방법을 제시하기 바람

- 10단계 미아리고개→아리랑고개 방향 공사구간 주변의 버스정류장 위치를 재검토하여 통행 불편을 최소화하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(2) : 신림∼봉천터널 도로(1공구) 건설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
남부순환로	2018.11월 ∼ 2023.05월	전 일	1∼3개 차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 본선터널구간 완공시기(전체공기)에 따라 남부순환로 진출입부 지하차도 공사를 추진하는 방안 검토 필요

※ 예산투입 지연으로 사업이 장기화 할 경우, 도로이용 불편사항이 가중될 우려가 있으므로 지하차도부만 예산을 집중 투자하여 공기를 최소화할 필요가 있음

- 상수도관 이설 공사기간 산정기준 및 공기에 대해 재검토하기 바라며, 야간작업 및 당일굴착 당일복구 방안을 검토하기 바람. 부득이 주야간 공사를 시행해야 한다면 교차로 점용단계만 야간공사를 시행하는 방안을 검토하기 바람

- 횡단보도 반폭공사 구간은 각각의 장비재치 계획을 제시하기 바라며, 공사 전·후 차로수표기를 재검토하기 바람

- 본선부 BOX구간 횡단보도 통과 구간은 상수도관 이설구간과 같이 각각의 장비배치 계획을 제시하기 바람

- A작업구 설치지점 점용폭 14.2m를 축소하여 차로수 확보하는 방안을 검토하기 바라며, C, D작업구 점용구간 버스정류장 부분은 점용연장을 축소하는 방안을 검토하기 바람

- 상수도, 본선 BOX, 작업구 공사가 동시에 발생하는 단계는 공정을 조정하여 점용도로에 대한 교통영향을 최소화하기 바람

- 공사구간 하류부 점용구간 등 불필요한 차로 점용구간을 최소화하기 바람

- 차로분리 구간의 방향지시 노면표시를 통일성 있도록 보완하기 바라며, 차로감소 구간은 하위차로 축소를 통해 운영할 수 있도록 재검토하기 바람

- 사전검토의견 6번 관련하여 지장물 위치를 재검토하여 교통처리계획도에 반영하기 바람

- 본선 2단계 세븐일레븐과 관악농형 인근 차로운영계획을 재검토하기 바람

- 본선 32단계, 33단계 등 교차로 면적 증가에 따른 소거시간 조정 등 신호운영체계를 재검토하기 바람

- 본선 49단계, 52단계 등 장비배치 계획을 고려하여 장비 진출입 체계를 재검토하기 바람

- 본선 59단계 세부단계 공사 가능여부를 재검토하기 바람

- 송수관 1단계, 8단계 등 공사장비 진출입체계에 대해 재검토하기 바라며, 차로 추가점용 및 단계 구분 등을 검토하기 바람

- 도로점용공사장 교통소통대책 현장이행 및 시민불편 최소화를 위해 현장 모니터링 계획을 수립하기 바라며, 교통운영과와 별도 협의하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부.