문서번호	교통운영과-11535
결재일자	2017.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통운영팀장	교통운영과장
백바름	서인석	06/20 강진동

2017년 제10차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06

『2017년  제10차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2016. 06. 15(목) 15:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

❍ 참석위원 : 9명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 8명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 박상섭 위원, 송두석 위원, 신치현 위원, 고진영 위원, 김지현 위원, 김은경 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 9건 (재심의 1건, 조건부 시행 8건)

- 종로 BRT 및 도로공간 재편사업

- 오금교 동측 지하차도 외 3개소 보수공사

- 2017년 정릉천고가교 외 1개소 보수공사

- 2017년 북부간선고가교 교면포장 개량공사

- 2017년 북부고가교 교면포장 개량공사

- 중랑동측 언더패스 외 2개소 보수공사

- 용산구 소월로 송배수관 정비공사

- 서초1교∼진흥아파트간 배수관 정비공사

- 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

자문안건(1) : 종로 BRT 및 도로공간 재편사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
종 로	2017.06.30.∼ 2018.02.22	전 일	2∼3개 차로	도시가반시설본부

❍ 자문결과 : 조건부 시행 (지정위원 검토 : 박상섭, 이동원, 김은경위원)

- 종로의 통행특성을 고려하여 불편사항을 최소화할 수 있도록 기간 단축 가능한 공사단계 및 방법을 재검토하여 교통소통대책을 수립하기 바람

※ 전구간 일괄 중앙차로 점용을 통한 공사 또는 노면포장 단계 및 보도확장 단계의 동시 추진 등 다양한 방법으로 검토하기 바람

- 또한 주변 행사 계획을 고려하여 단계별 교통소통대책을 보완하기 바람

- 위 조건에 대해 면밀히 보완하여 지정위원 검토 또는 소위원회를 통해 자문회의 결과 보완서를 제출하기 바람

자문안건(2) : 오금교 동측 지하차도 외 3개소 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
서부간선도로	2017.07.01.∼ 2017.08.14	야 간	1개 차로	서울시설공단 도로시설처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 13, 14단계 등 진출입램프 접속부 주변에서 급한 차로변경이 발생하지 않도록 안전대책을 보완하기 바라며, 단계별 교통처리계획도는 도로 점용구간에 따른 서비스 수준으로 보완하기 바람

- 단계별 우회전략(안양천길 등)에 대해 서부간선도로 진출지점 등 상세한 내용을 추가하여 제출하기 바람

- 현황 분석 및 단계별 교통처리계획도에 표시된 분석결과 중 LOS(평균밀도)에 대해 재검토하기 바라며, 점용도로의 교통현황을 고려하여 보완 제시하기 바람

- 도로점용폭에 대해 재검토하여 주행 차로폭을 추가 확보할 수 있는지 재검토하기 바람

자문안건(3) : 2017년 정릉천고가교 외 1개소 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
내부순환로	2017.07.01.∼ 2017.11.27	야 간	1∼2개 차로	서울시설공단 도로시설처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 2개 차로를 점용하는 단계는 점용폭을 일부 축소하여 주행차로의 여유공간을 확보하기 바라며, 차로 점용구간의 시점부를 직선구간으로 이전하기 바람

- 단계별 도로점용구간에 장비배치도를 추가하기 바라며, 보수 공사 시에는 VDS에 대한 위치파악과 인력들의 유의/주의에 만전을 기하기 바람

자문안건(4) : 2017년 북부고가교 교면포장 개량공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
내부순환로	2017.07.01.∼ 2017.09.01	야 간	1개 차로	서울시설공단 도로관리처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 단계별 공사시간에 대해 재검토하여 보완하기 바라며, 시공 가능 유무를 고려하여 단계별 점용면적 및 교통소통대책을 재검토하기 바람

- 단계별 점용구간 종점부의 여유 공간을 추가 확보하기 바람

- 13단계 진입램프와 본선 접속부의 안전을 확보하기 위한 대책을 검토하기 바라며, 15단계 진입램프 차로축소 지점을 램프 상류부로 이전할 수 있도록 재검토하기 바람

- 21단계 진입램프 차로축소 지점을 램프 상뷰루로 이전할 수 있도록 재검토하기 바라며, 접속부 안전을 확보할 수 있도록 본선 차로 축소에 대해 검토하기 바람

- 42단계 2개 차로 점용의 경우, 단계적 차로 변경이 가능하도록 보완하기 바람

- 51단계, 52단계 진입램프와 본선 접속부의 안전을 확보할 수 있도록 본선 차로 축소에 대해 검토하기 바람

- 차로 점용구간의 시점부가 직선구간에서 발생할 수 있도록 재검토하기 바람

- 중간 차로를 점용하는 단계는 차로변경 테이퍼를 하위차로 방향으로 조정하기 바람

- 공사에 대한 정보가 장시간 노출될 수 있도록 VMS 운영 계획을 상세히 제시하기 바람

- 도로점용에 대한 정보 및 우회전략을 교통정보시스템을 통해 홍보할 수 있도록 적극적인 방안을 마련하기 바람

자문안건(5) : 2017년 북부간선고가교 교면포장 개량공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
북부간선도로	2017.08.01.∼ 2017.09.26	야 간	1개 차로	서울시설공단 도로관리처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 도로점용에 대한 정보 및 우회전략, 유출램프 통제에 대한 내용을 간단명료하게 홍보할 수 있는 VMS 이외 방안(교통정보시스템, 배너 등)을 추가 마련하기 바람

- 차로별 점용 정보를 제공할 수 있도록 홍보 계획을 재검토하여 제시하기 바람

- 시공 가능 유무를 고려하여 단계별 점용면적 및 교통소통대책을 재검토하기 바람

- 공사에 대한 정보가 장시간 노출될 수 있도록 VMS 운영 계획을 상세히 제시하기 바람

- 11단계, 13단계 점용구간 시점부에 이동식 VMS를 운영하기 바람

- UPRamp 도 입구 Gantry에 설치된 초소형 VMS를 활용해 진입 통제/금지 등 정보를 제공하기 바람

자문안건(6) : 중랑동측 언더패스 외 2개소 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
동부간선도로 북부간선고가교	2017.07.23.∼ 2017.11.30	야 간	1∼2개 차로	서울시설공단 도로시설처

❍ 자문결과 : 재심의

- 북부간선고가교 공사구간 주변으로 계획하고 있는 공사에 대해 검토하여 공정 및 공종상 조정 및 협의가 필요한 사항을 확인하기 바람

- 동부간선도로 본선 2개 차로 축소 단계에 대해 주변 교통현황을 고려한 대기행렬, 서비스 수준 분석을 시행하고, 2개 차로 축소에 대한 영향권을 명확히 제시하기 바람

- 또한 분석 결과를 근거로 문제점을 도출하고, 그에 대한 개선대책을 수립하여 제시하기 바람

- 시간대별 교통량을 고려하여 야간공사 단계의 공사시점을 24시로 재검토하기 바라며, 요일별 교통량을 고려하여 동부간선도로 점용공사 2, 3단계의 시행계획을 재수립하기 바람

- 교면포장 과거 자료를 재검토하여 2개 차로 점용에 대한 사유를 비교 제시하기 바람

- 공사에 대한 정보가 장시간 노출될 수 있도록 VMS 운영 계획을 상세히 제시하기 바람

- 도로점용에 대한 정보 및 우회전략, 유출램프 통제에 대한 내용을 간단명료하게 홍보할 수 있는 VMS 이외 방안(교통정보시스템, 배너 등)을 추가 마련하기 바람

자문안건(7) : 용산구 소월로 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
소 월 로	2017.06.26.∼ 2017.11.30	야 간	2개 차로	중부수도사업소

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사방법 및 장비제원, 장비배치 등을 재검토하여 시공 가능한 점용면적을 제시하기 바라며, 차로 및 점용구간 이외 여유공간을 점용구간으로 활용하기 바람

- 점용구간의 연속성을 확보할 수 있도록 차로운영 계획을 재수립하기 바람

자문안건(8) : 서초1교∼진흥아파트간 배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
서초대로	2017.07.15.∼ 2017.08.05	야 간	1∼2개 차로	강남수도사업소

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 장비제원을 재확인하여 시공 가능한 점용면적 및 교통소통대책을 수립하기 바람

- 차로 및 점용구간 이외 여유공간을 점용구간으로 활용하기 바람

자문안건(9) : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(복구공사)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
백제고분로	2017.06.01.∼ 2017.08.30	주야간	1∼2개 차로	도시기반시설본부

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 사전검토의견 3번에 대해 안내표지를 추가 보완하기 바람

- 3, 4, 5, 7단계 점용구간에 위치한 횡단보도에 대해 보행자와 차량과의 상호 시인성이 확보될 수 있도록 대책을 수립하기 바람

붙  임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부. 끝.