문서번호	교통운영과-1615
결재일자	2018.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
백바름		최진경	01/26 강진동
협조

2018년 제1차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1

교 통 운 영 과

2018년 제1차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

□ 자문회의 개최 개요

○ 개최일자 : 2017. 12. 21(목) 15:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

○ 참석위원 : 7명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 6명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 송두석 위원, 박상섭 위원, 김지현 위원, 박규영 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 7건 (조건부 시행 6건, 재심의 1건)

- 한강로일대 방재시설 확충사업 (관로공사 3구간) : 조건부 시행

- 가재울 5구역 주택재개발 사업 중로 1-1호선 확장 공사 : 조건부 시행

- Y22 개발계획에 따른 도시계획시설 설계 및 허가용역 :  조건부 시행

- 밤고개로 확장공사 (2구간) : 조건부 시행

- 제2자유로 종점부 입체화 공사 : 재심의

- 우장초교통학로 조성 공사 : 조건부 시행

- 동소문로 47길∼숭덕중학교 구간 BOX 관거 설치공사 : 조건부 시행

□ 자문안건(1) : 한강로일대 방재시설 확충사업(관로공사 3구간)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
한강대로	2018.2.1. ∼2018.5.31	전 일	1개 차로	용산구 치수과

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 관로공사에 대한 지역주민 사전 홍보계획을 수립하여 제출하기 바람

- 용산역앞 교차로 용산역방향 우회전 차량의 대기공간을 확보할 수 있도록 교통처리계획을 재수립하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(2) : 가재울5구역 주택재개발사업 중로 1-1호선 확장공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
거북골로	2018.02.01. ∼2018.05.01	전 일	1∼2개 차로	가재울5구역 주택재개발사업조합

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 2단계 공사방법 및 순서 등을 재검토하여 공사중 보도 유효폭(1.5m)을 확보하기 바라며, 남가좌삼거리 남서측 횡단보도 이전을 통해 보행통선을 개선하기 바람

- 2단계 횡단면도의 경우, 보행통로 계획을 포함하여 제시하기 바람

- 현수막 시안 관련하여 보다 시민의 이해를 도울 수 있는 내용으로 수정하기 바람

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(3) : Y22 개발계획에 따른 도시계획시설 설계 및 허가용역

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
국제금융로, 국제금율로 2길	2018.03.01. ∼2020.04.30	전 일	1∼3개 차로	와이이십이프로젝트금융투자(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 국제금융로 2길 공사단계를 시점으로 현장 모니터링을 실시하여 양방향 차로운영 계획에 대한 타당성을 재검토하고, 그 결과에 따라 운영 계획을 변경하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(4) : 밤고개로 확장공사 (2구간)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
밤고개로	2018.02.20. ∼2018.12.30	전 일	1개 차로	도시기반시설본부 토목부

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 1단계 공사단계 및 방법 등을 재검토하여 자곡사거리 도심방향 버스정류소, 보행통로, 주유소 진출입 체계 등을 보완하여 교통소통대책을 수립하기 바람

- 또한 작업장비 진출입 동선을 표시하기 바라며, 진출입구 주변에 보행안전도우미를 추가 배치하기 바람

- 1단계 서울율현초교앞삼거리, 4단게 방죽마을사거리 등 상·하류부 차로운영 계획 및 도로점용구간을 재검토하여 독립된 좌회전 차로를 운영하기 바람

- 1단계 자곡사거리(외곽방향) 하위차로 운영 게획을 재검토하여 교통안전을 확보할 수 있도록 보완하기 바람 (버스정류소 운영 계획 포함)

- 단계별 공사개요 및 교통처리방안의 경우, 교통처리계획을 반영하여 수정하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(5) : 제2자유로 종점부 입체화 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
증산로, 월드컵로, 가양대로	2018.06.01. ∼2020.12.06	전 일	1∼3개 차로	도시기반시설본부 토목부

❍ 자문결과 : 재심의

- 공사방법 및 단계 등을 재검토하여 1개 차로 축소를 기본으로(불필요한 보도 축소, 주행차로 확보) 하고, 전단계 교통처리계획을 수립하기 바람

- 오전 첨두시 교통영향을 최소화 할 수 있도록 공사종료 시간을 05:30분으로 조정하기 바라며, 광역적인 우회처리 방안(주변 교차로 신호운영체게 변경, VMS 운영 등)을 제시하기 바람

- 교차로 공사단계는 반드시 야간 점용공사로 시행하고, 공사장비 진입동선을 고려한 점용면적을 재검토하기 바람

- 단계별 교차로 차량유도선 변경이 빈번히 발생하오니, 운전자의 혼란이 발생하지 않도록 간소화 방안을 재검토하여 제시하기 바람

- 증산로 완공 후 교통처리계획 관련하여 교통섬 철거 등 교통안전 확보 방안을 우리과와 협의하기 바람

- 증산로 지하차도 개통 후 방면표시 설치 관련하여 재검토하여 미비한 단계를 보완하기 바람

- 가양대로 교통처리계획도는 공사단계를 반영하여 보완하기 바람

- 교통소통대책을 재검토하여 미비점을 보완하여 재상정하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(6) : 우장초교 통학로 조성 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
화곡로, 화곡로 43길	2018.3.1. ∼2018.4.30	전 일	1개 차로	강서구 도로과

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 등교 시간을 고려하여 공사시간 10시 이후로 조정하기 바라며, 등하교 학생의 안전을 확보할 수 있도록 보행안전도우미를 배치하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(7) : 동소문로47길∼숭곡중학교간 BOX관거 설치 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자	비고
동소문로, 종암로	2018.3.1. ∼2018.6.30	야 간	2개 차로	성북구 치수과

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 굴착폭 및 장비배치 방법을 고려하여 점용구간에 대해 재검토하기 바람

- 6단계 횡단보도 반폭 시공에 대한 교통처리계획도를 제시하기 바람

- 버스전용차로 점용단계의 경우, 버스운전자 교육 등 사전절차를 반드시 이행하기 바람

- 13단계 버스전용 좌회전 차로 노면표시를 정지선까지 연장하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(TGIS)에 등록하기 바람

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부. 끝.