문서번호	토목부-22017
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한상신		신정	11/29 임춘근
협조

용역 설계변경(5차 1회) 검토 보고

[남부순환로(개봉1사거리 주변) 평탄화공사 건설폐기물처리용역]

2021. 11.

도시기반시설본부

(토    목    부)

용역 설계변경(5차 1회) 검토 보고

[남부순환로(개봉1사거리 주변) 평탄화공사 건설폐기물처리용역]

“남부순환로(개봉1사거리 주변) 평탄화공사”건설폐기물처리용역의 실 처리된 수량으로 정산하여 설계 변경코자 검토 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

○ 건설폐기물처리용역 설계변경(5차 1회)요청[동일(감리) 21-3280('21.11.29.)호]

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 남부순환로(개봉1사거리 주변) 평탄화공사 건설폐기물처리용역(5차)

○ 위    치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC간

○ 규  모

▷ 폐콘크리트 : 18,321ton [5차: 당초(2,474ton)→변경(1,746ton)]

폐  아스콘 : 16,618ton [5차: 당초(2,203ton)→변경(804ton)]

혼합폐기물 :    733ton [5차: 당초(77ton)→변경(- ton)]

임목폐기물 :     32ton [5차: 당초(- ton)→변경(- ton)]

○ 용역기간 : 총차 2016.04.05. ~ 2021.12.31.(5차 2021.01.01.~ 2021.12.31.)

○ 도 급 액 : 총차 762,585,000원[5차:당초(100,000,000원)→변경(53,300,000원)]

○ 용 역 사 : 탄용환경개발㈜

○ 건설사업관리사 : ㈜동일기술공사 외 2개사

Ⅲ		설계변경 내용

○ 용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
* ***	****	**********	*********	***********
	***	****************	****************	***

- 변경사유 : 현장 여건에 따라 실제 반출된 처리수량을 반영하여 건설폐기물처리용역 내역을 정산 설계변경코자 함.

○ 폐기물 증·감 현황(5차 1회)

구 분	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
폐콘크리트	톤	****	****	****
폐아스콘	톤	****	**	******
혼합폐기물	톤	*	0	***

Ⅳ		조 치 의 견

○ 건설폐기물 실 발생량과 일치하도록 계약 수량을 정산한“남부순환로(개봉1사거리 주변) 평탄화공사 건설폐기물처리용역”의 5차 1회 설계변경을 검토한 결과 적정하므로 설계변경코자 합니다.

붙임 1. 감리단 보고내용 1부.

2. 설계변경(5차 1회) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.