문서번호	자전거정책과-11803
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	자전거도로사업팀장	자전거정책과장		보행친화기획관
박병철	박상위	배덕환		11/29 이혜경
협 조
	자전거시설팀장		권오정

용역 설계변경(정산)계획 보고

(정릉천~청계천 자전거도로 연결사업 디자인 및 실시설계 용역)

’21. 11.

도 시 교 통 실

(자전거정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

용역 설계변경(정산)계획
『정릉천~청계천 자전거도로 연결사업 디자인 및 실시설계』

「정릉천~청계천 자전거도로 연결사업 디자인 및 실시설계 용역」의 준공에 따른 설계변경(정산) 계획 보고임

□ 관련근거

○ 용역사 설계변경 요청 : **********************

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 정릉천~청계천 자전거도로 연결사업 디자인 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’20.12.07. ~ ‘21.11.30.

○ 용 역 비 : ***********

○ 용 역 사 : *****************************

□ 주요 과업(설계)내용

○ 자전거도로 교량신설*************************

○ 자전거도로 신설*********************

○ 자전거도로 기능개선 및 정비***********************

□ 주요 추진현황

○ ʹ20.08.13.   : 정릉천~청계천 자전거도로연결 추진계획 방침 수립

○ ʹ20.12.07.   : 설계 용역 계약 - *************

○ ʹ21.01.29.   : 착수보고회 개최 (ʹ21.04.11.~ 주간 공정회의)

○ ʹ21.04.29.   : 전문가 자문회의

○ ʹ21.06.09.   : 지역수자원관리위원회 심의

- ******************************************
*************************

○ ʹ21.09.24.   : 지역수자원관리위원회 소위원회 재심의

- *********************************************
********************************************

○ ʹ21.10.30.   : 특정기술선정심사위원회

- **********************

○ ʹ21.11.19.   : 실시설계도서 제출(자전거정책과 → 도기본 토목부)
공사계약심사 의뢰(도기본 토목부 → 계약심사과)

○ ʹ21.11.24.   : 공사계약심사 결과 통보(계약심사과→도기본 토목부)
예산변경요청(도기본 토목부 → 자전거정책과)

□ 설계변경 주요내용                                 (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
금액	**********	**********	***********

○ 변경사유 :「정릉천~청계천 자전거도로 연결사업 디자인 및 실시설계용역」 정산에 따른 용역비 감액

- *****************************************

○ 예산과목

- ********************************************* *************************************************

□ 향후계획

○ ’21.11.30 : 변경 계약 및 용역 준공

붙임 : 용역사 설계변경 공문(합의각서) 및 변경내역서 1부