“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	재난안전과-29394		주무관	재난관리팀장		재난안전과장		안전교통국장
등록일자	2021.11.30.
결재일자	2021.12.2.
공개구분	비공개(5)
			협조자
					재무과장
					계약팀장

한파대비 따숨소 제작·설치 및 유지보수 운영을 위한 -

따숨소 설계변경(3차) 시행 계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 한파대비 강남따숨소 제작설치 및 유지보수 운영

○ 사업규모 : 따숨소 181개소 유지보수, 철거, 보관, 재설치 등

○ 사업기간 : 2019. 11. 12. ~ 2022. 3. 31 .(3개월 연장)

○ 계약업체 : ㈜ 율진이앤씨

○ 소요예산 : 금 367,330천원 (변경 전 334,500천원)

□ 설계변경 사유

○ 겨울철 (2021.11.15. ~ 2022.03.15.) 한파대책 기간동안 따숨소 유지보수 및 정비

- 당초 : 2021.12.31.까지에서 ⇒ 변경 : 2022.3.31.까지로 3개월 연장

○ 겨울철 기간동안 따숨소 문 등 시설부품에 대한 보관비용 추가 등

- 당초 : 2021.11.30.까지에서 ⇒ 변경 : 2022.3.31.까지로 4개월 연장

□ 설계변경 내역

○ 내   역                                                                      (단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총 용역비	334,500	367,330	32,830	유지·보수 : 181개소 사업기간 : 3개월↑ (재난관리 기금)
공사원가	257,242	278,622	21,380
일반관리비 +이윤 + 임대료	46,849	55,314	8,465
부가가치세	30,409	33,394	2,985

	강 남 구
(		재난안전과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조(물가변동등에 따른 계약금액의 조정) • 동법 시행령 제74조 제1항 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 겨울철 한파대책 기간동안 따숨소 유지보수 필요 및 따숨소 부품에 대한 추가 보관사항 발생 등
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	-
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 한파대비 따숨소 제작·설치 및 유지보수 운영을 위한 -

강남 따숨소 설계변경(3차) 시행 계획

겨울철(2021.11.15.~2022.03.15.)기간 동안 따숨소 유지보수 및 정비비용 증가 및 따숨소 부품 보관비용 증가 등의 사유로 설계변경을 시행하여 따숨소 운영에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 한파대비 강남따숨소 제작·설치 및 유지보수 운영 용역

□ 사업규모 : 따숨소 181개소 유지보수, 철거, 보관, 재설치 등

□ 사업기간 : 2020. 11. 12. ~ 2022. 03. 31. (3개월 연장)

□ 계약업체 : ㈜ 율진이앤씨

□ 소요예산 : 금 367,330천원 (변경 전 334,500천원)

□ 예산과목 : 재난안전과, 재난예방 강남구현, 재난관리 추진(재난관리기금), 재난의 효율적 관리, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		설계변경사항

□ 설계변경 사유

❍ 겨울철(2021.11.15.~2022.03.15.) 한파대책 기간동안 따숨소 유지보수 및 정비

- 당초 : 2021.12.31.까지에서 ⇒ 변경 : 2022.3.31.까지로 3개월 연장

- 181개소 따숨소 중 일부 시설에 대한 이설 및 재설치, 교체 등 필요

❍ 겨울철 기간동안 따숨소 문 등 시설부품에 대한 보관비용 추가 등

- 당초 : 2021.11.30.까지에서 ⇒ 변경 : 2022.3.31.까지로 4개월 연장

□ 3차 설계변경 내역

(단위 : 천원)

비용항목		당 초 (2차)	변 경 (3차)	증 감	비 고
재료비	직접재료비	57,092	57,092	-
	간접재료비	6,096	7,583	1,487
	소 계	63,188	64,675	1,487
노무비	직접노무비	128,172	140,863	12,691
	간접노무비	10,253	11,269	1,016
	소 계	138,425	152,132	13,707
경비	경비 및 보험료 등	55,629	61,815	6,186
	소계	55,629	61,815	6,186
일반관리비		15,435	16,718	1,283
이윤		31,414	34,596	3,182
임대료		-	4,000	4,000
공급가액		304,091	333,936	29,845
부가가치세		30,409	33,394	2,985
총액 (만단위이하 절삭)		334,500	367,330	32,830

※ 유지보수 : 181개소 / 사업기간 : 3개월 증가 (재난관리기금)

Ⅲ		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 재난관리기금을 활용하여 설계변경을 정산 시행하고자 함

붙임  1. 설계변경내역서(3차) 1부.

2. 설계변경 관련 용역업체 공문(3차) 1부.  끝.