문서번호	물재생시설과-16480
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
전문관	물재생기획팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	오승민	임춘근		12/17 이정화
협 조
	하수계획팀장		김준형
	물재생기전팀장		황철호

중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역 시행계획

2019.12.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역 시행계획

물재생센터의 수처리 효율을 향상 시키고, 노후 슬러지처리시설 및 분뇨처리시설의 이전·지하화를 통해 상부공간 복합활용 기반조성을 위한 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역 시행계획을 보고드림

1		추진근거

○ 물재생센터 비전 3.0 계획 수립(’19.9.3. 시장 보고)

- 물재생센터 수처리 기능 강화 및 공간의 복합활용

○ 중랑물재생센터 시설현대화 추진계획(물재생시설과-13864호, ’19.10.15.)

		용역개요

○ 용 역 명 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획

○ 용 역 비 : 6,297백만원

- ’19년 예산 3,000백만원, ’20년 예산 3,297백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 365일

○ 주요내용

- 기본설계

► 슬러지처리시설/ 통합침사지/ 유입펌프 이전·지하화 설치 : 159만㎥/일

► 분뇨처리시설 이전·지하화 설치 : 4000㎘/일

*****************************

**********

************************************

3		추진경과

○ ’19.10.15 : 중랑물재생센터 시설현대화 추진계획 방침

○ ’19.11. 8 : 기술용역 타당성심사(심사결과 : 적정)

○ ’19.11.21 : 사업수행능력 세부평가기준 협의결과 통보

○ ’19.11.25 : 계약심의위원회 심의(심사결과 : 원안통과)

○ ’19.12. 2 : 기술용역 발주심의(심사결과 : 적정(조건부))

○ ’19.12. 4 : 나라장터 사전규격공개(등록번호 : 798600)

○ ’19.12. 9 : 일상감사 결과 통보

4		용역 시행계획

○ 용역구분 : 건설기술용역

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 낙찰자 결정방법 : 적격심사(사업수행능력평가(PQ)+ 기술제안서평가)

○ 용역수행자 선정절차

입찰공고	⇨	사업수행능력평가서 제출 및 평가	⇨	기술제안서평가서 제출 및 평가	⇨	적격심사 및 낙찰자선정	⇨	계약체결
(재무과)		(물재생시설과)		(물재생시설과)		(재무과)		(재무과)

► 수행실적평가(PQ) : 참여기술인(50점) + 유사용역실적(15점) + 신용도(10점) + 기술개발 및 투자(15점) + 업무중복도(10점)

► 적격심사 평가기준 : 용역수행능력(65점) + 입찰가격(30점) + 지역업체(3점) + 경영상태(2점)

○ 입찰참가자격

가.「엔지니어링산업진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제33조 규정에 의거 입찰참가신청 서류 접수마감일까지 산업통상자원부에 건설부문(상하수도, 구조, 토질‧지질), 기계부문(일반산업기계), 전기부문(전기설비), 환경부문(수질관리, 폐기물처리)  분야의 엔지니어링 업체등록을 필하고 해당분야별 기술인을 보유한 업체 또는「기술사법」제6조에 의거 입찰참가신청 서류 접수마감일까지 건설부문(상하수도, 토목구조 또는 건축구조, 토질 및 기초 또는 지질 및 지반), 기계부문(산업기계설비), 전기·전자부문(발송배전),〔또는 건설부문(건축전기설비)〕, 환경·에너지부문(수질관리, 폐기물처리) 전문분야의 기술사사무소를 개설 등록한 업체

나.「건축사법」제23조 규정에 의하여 입찰참가신청 서류 접수마감일까지 건축사사무소를 등록한 자 또는 동조 제9항 제2호의 규정에 의거 엔지니어링 활동주체에 소속된 건축사로 신고한 자

다.「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제44조의 규정에 의거 입찰참가신청 서류 접수마감일까지 국토교통부장관 또는 시‧도지사에게 일반측량업 또는 공공측량업으로 등록을 필한 업체로,「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제7조에 따라 공공구매정보망에 직접생산확인(측량용역) 등재된 중소기업확인서를 보유한 중소기업자

라.「전력기술관리법」제14조, 같은 법 시행규칙 제25조 규정에 의한 입찰참가신청 서류 접수마감일까지 전력시설물 설계업에 개설 등록한 업체

마.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제7조에 따라 입찰참가신청 서류 접수 마감일까지 공공구매정보망에 직접생산확인(지질연구조사서비스) 등재된 중소기업확인서를 보유한 중소기업자

※ 대표사를 포함하여 5개사 이내로 공동도급(공동이행, 분담이행, 혼합방식)으로   참여 가능하며, 측량 및 토질조사 분야는 분담이행방식으로 수행

○ 관련근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제13조(낙찰자 결정) 제2항

제1호, 같은법 시행령 제42조

-「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) 제3장

-「서울특별시 건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준」(’19.5.1)

5		기타사항

************

*********************

►**********************

*************

**************************************************

*************

************************************************* ***************************************

**********************************************    ***************************

6		향후계획

○ ’19. 12 : 용역 발주

○ ’19. 12 : 입찰공고 및 수행능력평가

○ ’20. 1  : 기술제안서 평가

○ ’20. 2  : 가격입찰 및 용역업체 선정

○ ’20. 2 ~ ’21.2 : 용역 수행

붙임  1. 사업(기술용역) 추진계획 방침 1부.

2. 기술용역 타당성 심사결과 1부 1부.

3. 사업수행능력 세부평가기준 심의결과 1부.

4. 기술용역 발주심의 결과 1부.

5. 계약심의 결과 1부.

6. 일상감사 결과 1부.

7. 입찰공고문(안) 1부.

8. 과업내용서 1부.

9. 설계내역서 1부.

10. 사업수행능력 세부평가기준 1부.

11. 사전규격공개 내역 1부. 끝.