문서번호	토목부-2198
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이회진		장종환	02/10 하현석
협조

(창동 상계 동서간 연결교량공사 감독권한대행등 건설사업관리용역)

물가변동(E/S)에 의한 계약금액 조정(1회) 검토보고

2022. 2.

도시기반시설본부

(토  목  부)

(창동 상계 동서간 연결교량공사 감독권한대행등 건설사업관리용역)

물가변동(E/S)에 의한 계약금액 조정(1회) 검토보고

『창동 상계 동서간 연결교량공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』   물가변동(E/S) 계약금액 조정(1회) 검토결과 및 조치계힉을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 규 정

□ 건설사업관리용역 물가변동(제1회)으로 인한 계약금액 조정 승인 요청(감리부-22-00097, ‘22.02.04)

□ 지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정)

□ 지방계약법시행령 제73조 및 시행규칙 제72조(물가변동에 의한 계약금액 조정)

□ 용역계약 일반조건 제6절 2항(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 창동상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역관리용역

□ 용역규모 : 아치교(L=110.5m), 보차도교(L=118m) 건설사업관리

□ 용 역 비 : *********************

□ 용역기간 : *************************************************

□ 용 역 사 : ***************

Ⅲ		검 토 내 용

□ 물가변동 적용 요건 및 조정방법

○ 계약금액 조정 요건 : 2가지 조건 동시 충족

- 계약체결 후 또는 직전 물가변동으로 인한 계약금액 조정일로부터 90일 경과

- 품목조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

○ 계약금액 조정방법 : 품목조정률(용역계약 일반조건)

□ 물가변동 계약금액 조정 검토

○ 계약금액 조정대상 여부 : 조정대상

계약일	착공일	준공예정일	기준시점 (입찰일)	조정기준일 물가변동일	경과 일수	기준일수
**********	**********	**********	**********	**********	***	*******

○ 등락율 산정 (건설사업관리기술자 임금 비교-고시단가)

구 분	기준시점(2021.1.1) 2021년 상반기 노임	비교시점(2022.1.1) 2022년 상반기 노임	등락율	비고
****	***************	***************	*****	*****
***	***************	***************	*****	*****

○ 등락폭(조정단가) 산정

품명	규격	계약체결 당시단가	계약단가	물가변동 당시단가	등락율	등락폭	조정단가 (원/인.월)	비고
** ***	** **	*********	*********	*********	*****	*******	*********
***	***** **	*********	*********	*********	*****	*******	*********

※ 계약단가 < 계약체결 당시 산정한 가격 < 물가변동 당시 산정한 가격 인 경우 등락폭 = 계약단가 × 등락율

※ 계약단가는 최초 계약단가(또는, 직전 물가변동율이 반영된 물가변동 조정단가)임

※ 도서인쇄비를 비롯한 차량비 등의 직접경비 중 인건비와 관련없는 일부 품목은 등락폭이 없는 것으로 산정

□ 물가변동(E/S)산출(1회)

○ 물가변동 증가액 : 79,000천원

구 분	총 괄	비고
1. 기준시점(입 찰 일)	*************
2. 비교시점(조정기준일)	*************	90일이상 경과
3. 용역 계약금액(B)	**************
4. 물가변동 적용제외 계약금액(C)	************	조정기준일 이전 이행금액
5. 물가변동 적용대가(D)=B-C	**************
6. 물가변동 등락 대상 조정금액(G)=A*D	************
7 품목조정율(A) =G/D×100	*****	≥3%
8. 선급금 공제액	**
9. 단수조정 금액	**
10. 실 증감금액	***********
11. 변경 용역 계약금액(=B＋G)	**************

○ 계약금액 조정내역

구 분	용역비(천원)		증·감	비 고
	당 초	변 경
***	*********	*********	*********
****	*******	*******	*********

Ⅲ		조 치 계 획

□ 물가변동 관련 제반법규에 따라 품목조정율이 적정하게 산출되었고, 직전 조정 기준일로부터 90일 경과하고 품목조정율이 3.0%이상 증가로 물가변동 조정 사유에 해당하므로 계약금액(E/S)을 조정하고 설계변경 및 변경계약을 시행 하고자 함.

붙 임 : 1. 관련공문 및 계약금액 조정 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차2회, 1차2회) 1부. 끝.