문서번호	도시철도계획부-1273
결재일자	2022. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	경전철설계과장	도시철도계획부장
최호연	박범진	02/16 정대현

위례선 도시철도 건설공사

철도교통시설안전진단 용역 추진 계획

2022. 2.

도시철도계획부

「위례선 도시철도 건설공사」

철도교통시설안전진단 용역 추진계획

위례선 도시철도 건설사업의 교통시설 안전을 위하여「교통안전법」제34조에 따라 철도교통시설안전진단 용역을 추진코자 함.

□ 관련근거

○「교통안전법」제34조제1항(교통시설안전진단)

- 철도교통시설을 설치하려는 자는 해당 시설의 설치 전에 교통시설안전진단을 받아야 함.

○「교통안전진단지침」제2장 제1절 1.4. 다. (국토교통부고시 제34호)

- 교통시설안전진단 중 민자사업, 턴키사업에 대한 교통시설안전진단은 교통안전공단이 수행함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 마천역 ～ 복정역, 남위례역(지선)

○ 규    모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : ’19. 8. ~ ’25. 9.

○ 총사업비 : 2,614억원(LH·SH 분담금)

〈 추진경위 〉

○ '19.  5. : 업무협약 체결(국토부/서울시/LH 등 7개기관)

○ '20.10. : 기본계획 승인(국토교통부)

○ '21.  5. : 입찰공고

○ '21.12. : 실시설계 적격자 선정, 공사착수

○ '22.   2.   : 실시설계 중 ('21.12.14. ~ '22.6.11.)

□ 용역 추진계획

〈 용역개요 〉

○ 용 역 명 : 위례선 도시철도 건설공사 철도교통시설안전진단 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 7개월

○ 용역범위 : 마천역 ～ 복정역, 남위례역(지선)

○ 소요예산 : 171,935천원

- 예산과목(교통사업 특별회계)

도시철도 및 광역철도 건설, 광역철도 건설사업, 위례선 도시철도 건설(교통개선분담금), 시설비(401-01)

〈 주요 과업내용 〉

○ 교통현황 분석, 대상구간 자료검토 및 현장조사

○ 교통안전진단 실시 및 검토결과, 권고사항 제시

○ 교통안전진단 보고서 작성 및 관계기관 협의 등

□ 향후계획

○ ’22. 2. : 기술용역 타당성심사 요청(→기술심사담당관)

○ ’22. 2. : 교통안전진단용역 발주 방침 수립

○ ’22. 3. : 교통안전진단용역 계약 및 착수

붙임 1. 기술용역 타당성심사 요청서 1부.

2. 설계내역서(안) 1부.

3. 과업내용서(안) 1부.  끝.