투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사 설계변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-6342(2014. 9. 16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사』에 대한 설계변경을 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사

나. 공사기간 : 2014. 7. 25 ~ 9. 22

다. 계 약 자 : ㈜스마일그룹 대표 권민정

라. 계약금액 : 금152,363,700원

마. 변경금액 : 금159,400,000원(증7,036,300원)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		159,863,700	159,863,700	0
도급비	공급가액	138,512,455	144,909,091	증6,396,636
	부가가치세	13,851,245	14,490,090	증639,664
	계	152,363,700	159,400,000	증7,036,300
이설비		7,500,000	463,700	감7,036,300

바. 설계변경사유 : 당초 예산부족으로 미반영된 잔여구간을 설계변경 시공하고, 당초 설계에 누락된 폐기물처리비을 설계에 반영

사. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인환경․생태

테마공원육성, 공원․녹지관리 수준향상, 산하공원운영, 여의도공원유지관리, 시설비(100-401-01).

붙임 :  1. 설계변경 계획보고서 1부.

2. 설계변경 도서 각 1부

3. 제비율 검증대장 1부.  끝.

주무관							명재철				시설팀장					김희태					여의도공원관리사무소장					박원근					서부공원녹지사업소장						09/16 안해칠
협조자				주무관							이수정					총무팀장							조기환
시행			여의도공원관리사무소-6346										(						)		접수												(						)
우	150-110					서울 영등포구 양화동 95번지																/
전화		02-761-4079							/전송			02-786-2599					/	mjch3572@seoul.go.kr													/	대시민공개