투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	2022년 서울동물원 동물원내(남미관 실내) 시설공사 준공기한 연기 의뢰

1. 동물기획과-599호(2022.1.24.)와 관련입니다.

2.『2022년 서울대공원 동물원내(남미관 실내) 시설공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰합니다.

가. 공 사 명: 2022년 서울대공원 동물원내(남미관 실내) 시설공사

나. 공사업체: *********************

다. 총공사금액: **************************************

라. 공사기간 연기내역

변경사항	당 초	변경	비 고
준공기한(연장)	****************************	****************************

마. 연기사유: 남미관 실내 시설공사에 대한 설계 검토사항 추가(동물이동통로 개방방법에 대한 사육사 작업환경 편리성 보완)

바. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 준공기한 연장 검토 보고서  1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	동물기획과장
주무관	김주영		동물기획과장	03/14 김세곤
협조자	주무관	박진선		총무과장	박신근
시행	동물기획과-1884	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 5층 식품정책과	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화	02-2133-4725	/전송	02-2133-4911	/	7776jy@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)