문서번호	여의도공원관리사무소-6384
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
명재철	김희태	박원근	09/17 안해칠
협 조

여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사

준공기한 연기 검토 보고

2014. 9

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사

준공기한 연기 검토 보고

여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사 시행중 추가공종 발생 및 예산부족으로 미반영된 잔여구간에 대한 추가시공 등으로 공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 합니다.

Ⅰ	공 사 개 요

1. 공 사 명 : 여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사

2. 위    치 : 영등포구 여의공원로 68(자연생태숲)

3. 공사기간 : 2014. 7. 25. ~ 9. 22.

4. 공사내용 : 관찰로 94경간, 관찰로 연결데크 5개소, 데크판재 3㎡

5. 공 사 비 : 금159,863,700원 (도급비 159,400,000원 이설비 463,700원)

6. 도 급 자 : (주)스마일그룹 대표 권민정

Ⅱ	준공기한 연기내용

1. 당    초 : 2014.  9. 22.

2. 변    경 : 2014. 10. 06.(14일 연장)

3. 귀책소재 : 서부공원녹지사업소(여의도공원관리사무소)

4. 지체상금부과여부 : 미부과

5. 연기사유 : 추가공종 발생 및 예산부족으로 미반영된 잔여구간 추가시공 및 공사기간중 잦은 강우로 공기 부족

※ 공사기간중 강우일수 : 총 14일

Ⅲ	보고자 의견

❍ 공사 시행중 추가공종 발생 및 예산부족으로 미반영된 잔여구간 추가시공 및 공사기간중 잦은 강우로 공기가 부족하여 당초 공기내 준공이 어려우므로 준공기한을 연기함이 타당할 것으로 사료됨.

붙 임 : 기상청 일기자료 1부.  끝.