34개소 침수취약지역 해소사업 추진 현황

2022

물순환안전국

(하천관리과)

34개 침수취약지역 해소사업 추진현황

2010년, 2011년 집중호우 이후 지역 특성에 맞게 방재시설물 확충

□ 사업개요

○ 사업목적 : 2010년, 2011년 집중호우로 발생된 침수피해에 대한 침수 원인별 배수개선대책 수립하여 상습침수지역 해소 사업을 시행하여 안전한 도시 구현

○ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2023.12

○ 사업내용 : 하수관거 정비, 펌프장 신․증설, 저류조 신설, 하천 단면 확장 등

○ 총사업비 : 15,291억원(‘21년까지 14,757억원)

합계	2018 이전	2019	2020	2021	2022	2023년
15,291	12,944	918	537	358	331	203

□ 추진현황 : 완료 30개소, 추진중 4개소

완 료 (30개소)							시행중 (4개소)
`13년 5개소	`14년 4개소	`15년 3개소	`16년 4개소	`17년 6개소	‘18년 6개소	‘20년 2개소	‘22년이후 4개소
∘구의, 자양동 ∘면목동 ∘미아삼거리역 ∘장위동 ∘가산디지털단지지	∘을지로 입구역 ∘영림초교 주변 ∘장안1동주민센터 ∘선릉역 주변	∘신촌현대백화점 ∘성대시장 ∘광화문	∘풍납1,2동 주민센터 ∘공릉초교 일대 ∘공항펌프장 ∘용답동답십리	∘신천지역 ∘잠원지역 ∘대치역사거리 ∘도림천(3개소)	∘한강로 일대 ∘신월지역(2개소) ∘시흥사거리 ∘내방역사거리 ∘암사역 주변	∘오류동 일대 ∘강서구청사거리	∘길동(‘22) ∘사당역(‘23) ∘망원(‘23) ∘강남역(‘23)

□ 추진 계획

① 길동 일대	∘ 하수관거 정비(4.19km) - 완료 L=3.79km(`22년 완료)	② 사당역 일대	∘ 사당천 단면확장(1.0km) - 완료 L=0.54km(`23년 완료) ※ 사당저류조 2개소 완료(`13년)
③ 망원 일대	∘ 빗물펌프장 신설(`23년 완료) ∘ 유입관로 신설(`23년 완료) ※ 하수관거 정비(1.33㎞) 완료	④ 강남역 일대	∘ 유역분리터널공사(1.3km) - 터널 관통 완료(`22년 완료) ∘ 유역경계조정(87.1ha) - 완료 59.6ha(`23년 완료) ※ 용허리저류조, 역경사관로개선 완료