코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	오금지구 방음판 파손 보수 완료보고[준공지구 미인계시설 유지보수공사]

「서울오금 공공주택지구 조성사업」과 관련, 오금지구에 설치한 방음벽에 대하여 방음판 파손 민원에 따라 이를 보수하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아  래 -

가. 공사개요

○ 공 사 명: 준공지구 미인계시설 시설물유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간: 2021.03.05. ~ 2022.02.28.

○ 도 급 자: 주식회사 대형에스엘

○ 도 급 비: 386백만원

나. 관련근거

○ 도시조성부-241호(2022.01.14.),「오금지구 방음판 파손 보수 지시」

다. 조치내용

○ 방음판 파손 보수

○ 주요 공사 물량

구 분	단위	기정	변경	증·감	비고
방음판 교체
방음판 설치	식	-	1	증)1	1.0*1.96*12개소
투명방음판(접합유리)	[eqn: m ^{2}]	-	23.52	증)23.52

○ 소요예산                                                             (단위: 원)

구 분	기정	변경	증·감	비 고
직접공사비 (도급공사비)	-	9,181,018 (13,244,000)	증)9,181,018 (증13,244,000)	-

※ 신규비목 기술심사결과 : 견적발주부-790호(2022.02.21.) - 별도 의견 없음

라. 조치계획

○ 상기 검토 내용을 「준공지구 미인계시설 시설물유지보수공사」계약변경시 반영.

붙임  1. 20220217_오금지구-2차 작업지시서 1부

2. 20220217_오금지구-2차 작업지시서 1부

3. 기술심사 결과 회신 1부.  끝.

부 원						도시조성부장				도시공간조성처장		02/24
		이영규						병가			문광만
협조자	부 원		유재훈

시행			도시조성부-829				(2022.02.24)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-7643			전송	02-3410-7621		/	yglee@i-sh.co.kr					/	공개