문서번호	교통운영과-17966
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
송시영		유승효	09/26 강진동
협조
	주무관		조혜진

기술용역 준공기한 연기 검토 보고(강북)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통운영과

기술용역 준공기한 연기 검토 보고

“교통소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계 용역(강북)” 계약  상대자로부터 사업시행기관의 설계 추가 및 변경 요구로 인한 기술용역 준공기한 연기요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 동일(교통) 제14-2537호(2014.9.25) : 과업연기 요청

○ 한강사업본부 시설관리과-2635(2014.09.24.)호 : 추가반영 요청

□ 용역개요

○ 용역규모

- 교통소통개선사업 : 기본및실시설계 24개소, 모니터링 10개소

- 횡단보도확충사업 : 기본및실시설계 15개소

○ 용역기간 : ’13.3.12~’14.09.30

○ 용 역 사 : ㈜동일기술공사

○  용 역 비 : 165,958천원

□ 준공기한 연기내용

○ 준공기한 변경

구 분	도급금액 (천원)	용 역 기 간		비 고
		당 초	변 경
전체	165,958,000	2013.3.12 ~ 14.09.30	2013.3.12 ~ 14.11.28	증59일

※ 도급비 변경없음

□ 검토내용

○ 상기 용역 진행중 사업시행기관(한강사업본부)으로부터 설계 추가 및 변경 요구에 따른 설계도서의 재작성을 위하여 준공기한 연기가 필요한 사항임.

○ 귀책사유 : 우리시

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 기술용역에 대한 준공기한 연기를 시행하여 용역 추진에 차질이 없도록 조치코자 함.

□ 따로붙임

1. 요청공문 1부.

2. 사업시행부서 요청공문 1부

2. 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.