아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(응봉1지구 저수호안 사석 연장시공 실정보고 승인통보(중랑천 생태회복))

1.업무지시현장 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(장기 1차) 주식회사 천일

2.작 성 일 자 : 2022-10-31 07:10:47

3.지 시 내 용

가. 천일 중랑천(감) 제22-197호(2022.10.27.)와 관련입니다.

나. 중랑천 마스터플랜 단기사업의 일환으로 추진 중인 「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」관련, 건설사업관리단에서 보고한 '응봉1지구 저수호안 사석 연장시공 실정보고'에 대하여 승인통보하오니, 사석시공 시 응봉교 교각과 친수계단 기초부 사이 와류로 인한 세굴 및 친수계단 종점부~당초 사석부설 시점부 사이 유수에 의한 피해와 사면침식 등이 발생하지 않도록 성실시공하여주시고, 공사 시 공사근로자 및 중랑천이용 시민의 안전에 유의하여 사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여주시기 바랍니다.  끝.

주무관	송민섭		치수시설과장	손창익		방재시설부장	10/31
이동훈
협조자
시행	방재시설부-29469	(	2022.10.31	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8772	/전송	02-3708-8756	/	sms2002@seoul.go.kr	/	대시민공개