문서번호	역사도심관리과-10256
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도심활성화팀장	역사도심관리과장	도시관리정책관		도시계획국장
박학균	이창구	김해성	류훈		10/06 이제원
협 조	주무관			한철민
	주무관			한민영

「세운상가군, 도심산업 활력거점 조성」

국제현상설계 공모 및 관리용역 추진계획

도시계획국

(역사도심관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	공모지침 및 관리용역	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	계약의뢰 및 공고	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용□				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「세운상가군, 도심산업 활력거점 조성」

국제현상설계 공모 및 관리용역 추진계획

“세운상가군, 도심산업 활력거점 조성사업”의 창의적이고 수준높은 설계 대안 발굴을 위해 국제현상설계 추진 및 공모의 성공적 수행을 위한 관리용역 시행 계획임
0

Ⅰ		추진배경

○ 세운상가군은 입지적․기능적으로 서울 도심의 핵심 거점지역이고

○ 도심산업 중심 허부역할 및 종묘~남산으로 이어지는 보행(녹지)네트워크 구축을 통한 주변지역 활력(재생)을 불어넣도록 전 세계 전문가가 참여하는 국제현상설계 공모 필요

※ 세운상가 활성화 자문단 회의시 “국제현상설계 추진” 결정(‘14.9.18)

Ⅱ		추진경위

○ ‘13.08.05 ~12.26 : 세운상가군 활성화 TF팀 구성운영 등 (총 8회)

- 세운상가군 활용방안 국제심포지엄 개최(‘13.12.16)

○ ‘14.03.27 : 세운재정비촉진계획 변경고시

- 세운상가군 촉진구역에서 분리하여 존치관리구역 결정

○ ‘14.07.16 : 세운상가군 활성화 방안 용역 착수

- 활성화 기본계획 구상(이충기 총괄MP) / 거버넌스 운영 / 기록화

○ ‘14.08.06 : 세운상가군 활성화 주요사업 보고

- 시장보고(8.25), 행정2부시장(8.16, 9.24),

○ ‘14.09.18 : 세운상가 활성화 자문단 회의

- 창의적이고 수준높은 설계를 위해 국제설계공모 결정

Ⅲ		국제공모 추진계획

□ 기본 방향

○ 내실 있고 성공적인 국제현상 설계공모를 위해 공모 경험이 많고 책임감 많은 전문위원(PA)과 세계적으로 명망있는 심사위원 선정

○ 이를 위한 전문위원과 심사위원을 추천하고 공모 전반에 대한 자문을 하는 운영위원회 구성은 별도로 운영하지 않고 기존 “세운상가 활성화 자문단”을 활용하여 운영(추진)

- 공모방식과 설계지침에 대한 자문, 전문위원과 심사위원 추천 등

○ 원활한 공모운영을 위해 별도의「전문기관」에 위탁시행 하여 홍보, 심사, 전시 등 설계경기 운영에 필요한 제반업무 수행

□「세운상가 활성화 자문단」 활용(운영) 계획

❰기  능❱

○ (설계경기 조직구성) 전문위원(PA:Professional Adviser)과 심사위원회 추천

- 심사위원회 및 기술위원회 구성 : 전문위원(PA)과 협의를 통해 선정

○ (공모전반 자문) 공모기획과 설계공모 지침 등 공모 전반에 관한 사항

- 공모전 : 설계공모 방식, 설계지침 보완, 응모자격, 입상(권리/보상) 등

- 공모후 : 질의 접수/응답 자문, 자료제공범위, 홍보방안(홈페이지 구축/운영) 등

※ 공모 자문사항은 전문위원(PA)과 협의 후 추진

❰운  영❱

○ 운영기간 : 설계 공모전 ~ 공모 후(‘14.10 ~ ’15. 3)

- 공모 진행일정에 따라 운영기간 탄력적으로 조정 시행

○ 회의주기 : 매월1회 개최를 원칙으로 현안사항 있을시 수시 개최

- 필요시 소위원회 구성운영

○ 자문안건 : 자문단 회의에서 (차기)회의 의제 결정

- 설계공모 진행일정에 맞추어 회의주제 선정 및 회의방식 등 운영방식 결정

Ⅳ		관리용역 시행계획

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 세운상가군, 도심산업 활력거점 국제현상설계공모

○ 용역기간 : 계약일로부터 5개월

○ 용 역 비 : 240,000천원

○ 시행방법 : 일반용역   ※ 시행계획(방침)결정 후 계약심사 의뢰(10.10 완료)

- 우리시에서 별도 선정한 전문위원(PA)과 용업업체(팀) 협업으로 진행

※ 세운상가 활성화 자문단에서 전문위원(PA) 추천(선정)

○ 과업내용

-(기    획) 설계경기 운영에 대한 전반적인 사항과 공모방향 수립

-(홍    보) 홍보물 제작, 홈페이지 구축(운영) 등 다양한 홍보 수행

-(질의회신) 질의접수, 번역 및 질의회신 기술자문

-(심    사) 심사위원 초청 및 의전 등 원활한 심사를 위한 심사지원

-(기    타) 작품 전시회개최, 작품집 제작, 향후 당선자 계약관련 지원 등

○ 운영방안

-(공모지침) 기본구상의 건축·디자인분야, 구조분야 및 조경분야 전문가의 협업과 PA의 통합조정

-(관리용역) 서울시에서 선정한 전문위원(PA) 책임하에 관리 용역사와 업무협의 및 조정

□ 발주 방법

○ 입찰방법 : 일반공개 경쟁입찰(제안서 평가)

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

○ 참가자격

- 공고일 기준「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률」제31조 및 동법시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 아니한 자

- 공고일 기준 다음 각 호에 해당된 자

① 국·공립 및 정부출연 연구기관

② 교육법에 의한 대학, 전문대학 및 부설연구소

③ 민법 또는 다른 법률에 의해 설립된 연구기관, 단체 및 법인

○ 선정절차

입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

○ 제안서 평가 : 기술능력평가(80) + 입찰가격평가(20)

- 기술능력평가(80) : 정량적 평가 + 정성적 평가

- 입찰가격 평가(20)

※ 제안서 평가계획 : 추후 별도 보고 예정

Ⅴ		행정사항

□ 자문위원(PA포함) 수당 지급

○ 참석수당 : 기본(2시간이내) 100천원, 초과(2시간초과) 50천원 추가

- 검토수당 별도 지급 : 한국 엔지니어링 노임단가 적용

※ 공공개발센터 사무관리비 운영기준(안) 준용(공공개발센터-5704,‘13.7.16)

‣ 관리용역 계약전에는 세운상가 활성화 용역비용에서 지급

Ⅵ		향후계획

○ ‘14. 10월 : 전문위원(PA) 선정 등 현상설계 전반적인 사항 자문

- 공모지침 및 향후 일정 논의 등(차기 회의의제 선정)

○ ‘14. 10월 : 국제현상설계 관리용역 발주 및 입찰공고

- 계약심사 완료 및 발주 의뢰

○ ‘14. 11월 : 제안서 평가 및 계약체결(용역착수)

○ ‘14. 12월 : 공모지침 확정 및 국제현상설계 공모

○ ‘15. 03월 : 국제현상설계 확정(시상식)

○ ‘15. 4~8 : 기본 및 실시설계

○ ‘15. 08월 : 공사착공

○ ‘16. 12월 : 공사준공

따로붙임 : 1) 세운상가 자문단 명단 1부.

2) 과업내용서 및 설계내역서 각 1부.  끝.