문서번호	공원녹지과-23626		주무관		공원기획팀장	공원녹지과장		도시관리국장		부구청장		구청장
결재일자	2022.11.17.
			정미정		김혜란	김상주		유옥현		이방일		11/17 이순희
공개여부	부분공개(5)
			협 조
보도여부
				기획예산과장			전혜정
- 구민의 삶에 힘이되는 민선8기 공약 실천을 위한 - 북한산 체험형 숲속쉼터(산림여가공간)조성 추진계획
2022. 11. 17.
강 북 구 (공원녹지과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: 사업 추진 중 검토사항 포함)
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
	청탁금지법	(예: 인허가 등 업무 추진 시 부정청탁, 협찬·후원 등의 명목으로 부당금품 수수 행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명: )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

- 내 삶에 힘이되는 강북, 민선8기 공약 실천을 위한 -

북한산 체험형 숲속쉼터(산림여가공간)조성 추진계획

풍부한 산림과 입지여건이 우수한 북한산 자락에 휴식과 치유활동을 할 수 있는 체험형 산림여가공간을 조성, 주민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

1		추 진 근 거

□ 민선8기 강북구청장 공약(38. 북한산 체험형 산림여가공간 조성)

□「22년 북한산 체험형 산림여가공간 조성사업 추진계획」(市 자연생태과)

2		추 진 방 향

□ 숲 자원을 활용한 도시민들의 휴식·치유활동 공간 조성 및 산림복원

□ 북한산국립공원 및 서울둘레길과 연계한 숲길 쉼터 구상

□ 주민 누구나 이용할 수 있도록 보편적 시설 도입

3		사 업 개 요

□ 대 상 지: 수유동 산128번지 일대, 총72,978㎡ (토지소유: ㈜대우건설)

□ 추진기간: ’22. 1. ~ ’23. 12.

□ 조성내용: 서울둘레길과 연계한 휴양·치유공간 조성

○ [1단계] 주민의 산림 치유를 위한 체험형 산림여가 공간 조성

- 햇빛이완숲, 숲소리명상 쉼터, 숲속 맨발길, 순환 건강산책로, 유아숲놀이터 등

- 부지 내 마중길 보행로 정비 및 방문자 광장 조성: 숲마중마당, 숲나들이마당

○ [2단계] 부지 내 산림 훼손지 정비 및 복구

- 주민 이용으로 훼손된 산지의 수목식재, 샛길 폐쇄로 건전한 생태복원 시행

□ 소요예산: 금1,300백만원(시비)

	녹지활용계약 체결 개요
○ 대 상 지: 수유동 산128번지 일대 17필지 (총 72,978㎡) ○ 체 결 자: 강북구 - ㈜대우건설 ○ 체결일자: 2020. 12. 17. ○ 계약기간: 계약체결일로부터 5년간 및 공사 준공일로부터 5년간 ○ 계약내용: 수유동 산128번지 일대를 휴식공간으로 조성 후 시민에 제공

4		추 진 절 차

□ 사업추진 절차도

① 기본구상 및 타당성 조사용역	▶	② 녹지활용계약 체결	▶	③ 기본 및 실시설계용역 각종 영향평가 시행 (현재 시행중)	▶	④ 市 설계심의 및 계약심사	▶	⑤ 공사 시행 및 준공

□ 연차별 예산집행 계획

구 분	계	기투자(’19~’20)	2021년	2022년	2023년
사업내용	-	기본 구상 및 타당성 조사용역	투자심사	기본 및 실시설계용역 소규모 환경·재해영향평가	공사
사업비(백만원)	1,300	100	-	200	1,000

□ 향후일정

○ ’22. 11.~12.: 市 설계심의, 기본 및 실시설계용역 준공

○ ’23.  1.~  3.: 관계기관 협의(한강유역환경청, 市 물순환정책과), 산지전용허가 등

○ ’23.  4.~  5.: 용역준공(소규모환경영향평가·소규모재해영향평가), 계약심사, 공사발주

○ ’23.  5.~12.: 공사시행, 착공 및 준공

□ 조성후 운영계획: ‘산림치유’ 및 ‘숲해설’ 특화 주민 프로그램 운영

5		기 대 효 과

□ 체험형 산림여가공간 조성으로 주민의 삶의 질 제고

□ 숲속쉼터 명소화를 통한 방문객 유치로 지역경제 활성화 도모

붙임 : 기본계획(안) 및 민선8기 공약실천계획서 각 1부.  끝.