등록번호

지역건강과-31815

주무관

모자보건팀장

지역건강과장

보건소장

등록일자

2022.11.24.

강정훈

신차수

이병삼

11/24

박선정

결재일자

2022.11.24.

공개구분

부분공개(5)

협  조

『서대문 공공산후조리원 공사 및 감리용역』

준공기한 연기보고서

서 대 문 구

지역건강과

『서대문 공공산후조리원 공사 및 감리용역』

준공기한 연기보고서

우리 구에서 시행중인 「서대문 공공산후조리원 신축공사」와 관련하여 공사 및 감리용역 계약의 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 사업(계약)개요

○ 사 업 명 : 서대문 공공산후조리원 신축공사

○ 위    치 : 북가좌동 337-2외 2필지

○ 내    용 : 서대문 공공산후조리원 신축을 위한 공사 및 용역

2. 변 경 내 용

구 분 (서대문 공공산후조리원 신축)		준 공 기 한		연장일수	계약금액
		변 경 전	변 경 후
공사	건축/기계 공사	2022.12.05.	2023.05.31.	177일 증가	변동없음
	전기공사
	통신공사
	소방공사
감리	건축감리용역	2022.11.30.	2023.06.09.	191일 증가
	전기/통신/소방 감리용역	2022.12.18.	2023.06.09.	173일 증가

3. 연기사유

○ 관급 지열공사의 지연, 철근/레미콘 등의 수급 불안정, 코로나 19 감염병 예방 등에 따른 공기 지연으로 인하여 모든 공정의 준공기한 연장 필요

4. 연기귀책 : 서대문구청장

5. 지체상금부과여부 : 미부과

6. 보고자 의견

○ 시공사의 준공기한 연장 요청에 따른 건축과/감리자 보고서에 따라 준공기한을 연장 조정하고자 함.

○ 공사/용역 준공기한이 연장됨에 따라, 이와 연계하여 관급자재 준공기한 연장 실시 예정.

○ 준공기한 연장(2023.5.31. 공사준공 예정)에 맞춰 2023. 6월 중 위탁기관을 통한 운영 모의훈련, 시설 안정화를 위한 베이크아웃 등 실시 후 2023. 7월 개원 예정.

2022. 11.

보고자 : 행정6급 강정훈

서대문구청장 귀하