문서번호	도시재생과-21024
결재일자	2022.11.25
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		재생사업팀장		도시재생과장		스마트포용도시국장
조웅제		박정숙		정혜숙		11/25
						문성수
협조
	토목과장		김영훈

사근동 고갯길 친환경 CPTED 조성 추진 계획

사근동 도시재생활성화사업 사근동 고갯길 친환경 CPTED 조성 추진 계획

2022. 11. 24.

(도시재생과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [√] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [√] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [√]
		●	시기	:	시행 전 [√] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

사근동 도시재생활성화사업 사근동 고갯길 친환경 CPTED 조성 추진 계획

성동경찰서가 추진하는 사근동 고갯길 옹벽 친환경 CPTED(범죄예방 환경설계) 조성사업에 협조하여 도시경관을 개선하고 범죄를 예방하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조(도시재생사업의 시행)

□ 도시재생사업 추진을 위한 업무협약 추진(성동경찰서)
(도시재생과-2393호, 2020. 4. 17.)

Ⅱ		추진개요

<사근동 고갯길 친환경 CPTED 조성 사업지>

□ 위    치: 성동구 사근동 산32-2 일대
※ 규모: 약 154[eqn: m ^{2}]

□ 사업기간: 2022. 11. ~ 2023. 7.

□ 사 업 비: 65백만 원
(시비 15백만 원, 성동경찰서 50백만 원)

□ 추진경과 및 계획

○ 2022.   3. ~  8.	사근동 주민자치회 및 통반장 의견 수렴

○ 2022. 10. 20.	구 공공디자인 진흥위원회 자문(도시계획과)

○ 2022. 11월중	고갯길 옹벽 정밀 점검 용역 시행(토목과)

○ 2023.  1. ~  4.	점검 용역 결과에 따라 보수․보강 등 조치 시행(토목과)

○ 2023.  5. ~  7.	고갯길 환경친화 CPTED 조성 용역 시행(성동경찰서)

Ⅲ		세부추진계획

□ 사업개요

○ 사 업 명: 사근동 고갯길 친환경 범죄예방 환경설계 조성사업

○ 위    치: 사근동길 고개 옹벽(성동구 사근동 산32-2 일대)

※ 규모: 약 154[eqn: m ^{2}]

○ 사업기간: 2022. 11. ~ 2023. 7.

○ 총사업비: 65백만 원(시비 15백만 원, 성동경찰서 50백만 원)

- 옹벽 시설물 정밀 점검 용역(시비 15백만 원)

- 친환경 범죄예방 환경설계 조성 용역(성동경찰서 50백만 원)

○ 사업내용

- 옹벽 시설물 정밀 점검 및 사후조치

- 노후 옹벽의 식재 제거, 디자인 개선을 통한 심미성 향상

- 야간경관 개선을 통해 안전사고·범죄 예방 및 안심귀갓길 조성

□ 추진경위

○ 2022.   3. ~ 8.	사근동 주민자치회 및 통반장 의견 수렴

○ 2022. 10. 20.	구 공공디자인 진흥위원회 자문(도시계획과)

○ 2022. 11.	고갯길 옹벽 정밀 점검 용역 시행(토목과)

○ 2023.  1. ~ 4.	점검 용역 결과에 따라 보수․보강 등 조치 시행(토목과)

○ 2023.  5. ~ 7.	고갯길 환경친화 CPTED 조성 사업 시행(성동경찰서)

【사근동 고갯길 친환경 CPTED 조성 관련 도시재생과-토목과-성동경찰서 주요 협의 내용】

- 본 용역에 앞서 추진이 필요한 사근동 고갯길 옹벽 정밀 점검용역 및 용역에 따른 사후조치는 도시재생과 예산을 활용하여 토목과에서 시행

- 본 용역인 사근동 고갯길 환경친화 CPTED 조성 사업은 성동경찰서가 주관하여 추진하며,
향후 유지관리 업무 또한 성동경찰서가 수행

- 향후 조성될 시설물(조명)에 대한 전기설비(부하 계산, 배전, 분전함, 인입시설 관련 제반설비) 관련 사항은 설치 전 우리구 토목과와 별도 협의 후, 협의 완료된 전기시설 공과금은 옹벽(본체) 관리부서인 토목과에서 부담함

Ⅳ		협조계획

□ 용역개요

○ 용 역 명: 사근동 고갯길 옹벽 정밀 점검 용역

○ 위    치: 사근동길 고개 옹벽(성동구 사근동 산32-2 일대)

※ 규모: 약 154[eqn: m ^{2}]

○ 용역기간: 2022. 11. ~ 12.(예정)

○ 용 역 비: 15백만 원(추정)

○ 용역내용: 친환경 CPTED 조성에 앞서 옹벽 시설물 안전 점검

○ 용역방법: 토목과에 계약 요청하여 시행

○ 예산과목: 도시재생과, 도시재생, 도시재생, 사근동 도시재생 활성화 사업(보조), 시설비및부대비, 시설비(401-01)

○ 위 치 도

사근동 고갯길 친환경 CPTED 조성 사업지

○ 사후계획: 용역 결과에 따라 필요한 경우 보수․보강 조치 시행(토목과)

Ⅴ		행정사항

□ 타부서 협조 및 관리 구분

○ 토  목  과: 옹벽 시설물 정밀 점검 용역 및 보수․보강 시행,
사업 완료 이후 공과금 반영 및 납부

Ⅵ		향후계획

□ 향후계획

○ 2022. 11.	~ 12.	고갯길 옹벽 정밀 점검 용역 시행(토목과)

○ 2023.  1. ~   4.	점검 용역 결과에 따른 보수․보강 등 조치 시행(토목과)

○ 2023.  5. ~   7.	고갯길 환경친화 CPTED 조성 사업 시행(성동경찰서 주관)

붙임  사업 추진안 1부.  끝.