문서번호	방재시설부-14522
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김동현		오열상	10/19 박홍봉
협조

「휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계」

건설사업관리(설계단계) 용역 수의계약 시행계획

2020. 10.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계」

건설사업관리(설계단계) 용역 수의계약 시행계획

『휘경유수지 CSOs 저류조설치사업 실시설계 건설사업관리(설계단계) 용역』입찰이 2회 유찰됨에 따라 과업수행 가능업체와 수의계약 시행계획에 대하여 보고 드림.

1		용역 개요

❍ 용 역 명 : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 건설 사업관리(설계단계) 용역

❍ 용역기간 : 착수일로부터 300일

❍ 계약방법 : 수의계약(2회 유찰)

❍ 용 역 비 : 194,200천원

❍ 사업내용 : 합류식 하수관로 월류수(CSOs) 저류조 설치 실시설계

- 저류조 설치 기본 및 실시설계(저류조 설치 용량 : 40,000㎥)

- 부대시설 : 이송관로, 설비(스크린, 펌프, 세척, 계측, 탈취 등)

2		추 진 현 황

❍ ’19. 4. : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 착수

❍ ’19.12. : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본설계 완료(물순환정책과)

❍ ’20. 1. : 실시설계 착수(도시기반시설본부)

❍ ’20. 5. : 용역 일시중지(물순환정책과, 설계감리예산 미확보)‘

❍ ’20. 7. : 설계감리 추경예산 확보(물순환정책과)

❍ ’20. 7.~8. : 기술용역타당성 심사, 조달청 구매규격 사전공개

❍ ’20. 8. 18. : 1차 입찰결과 통보(유찰, 단독응찰)

❍ ’20. 8. 31. : 2차 입찰결과 통보(유찰, 단독응찰)

❍ ’20. 9. 28. : 단독응찰업체 포기각서 제출(동해종합기술공사)

※ 회사내 제반사정이 어려워 과업수행 불가

3		조 치 계 획

□ 재공고 유찰에 따라 수의계약 시행

❍ 근    거 :「지방계약법 시행령」제26 및 제30조

제26조(재공고입찰과 수의계약)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제19조제2항에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

1. 제25조제1항 각 호(제5호는 제외한다), 제26조제1항 및 제27조에 따른 계약의 경우

□ 수의계약 개요

❍ 계약상대자 : 태조엔지니어링(대표 한명식)

- 서울 송파구 백제고분로 503(방이동)

❍ 계약방법 : 수의계약(2회 유찰)

❍ 계약기간 : 계약체결일로부터 300일

※ 과업지시서, 설계내역 등 입찰공고시와 동일한 조건으로 계약추진

4		향 후 계 획

❍ ’20. 10. : 수의계약 의뢰(방재시설부 → 총무부)

❍ ’20. 10. : 계약체결 및 용역 착수

붙임  1) 건설사업관리(설계단계)용역 과업내용서 1부

2) 건설사업관리(설계단계)용역 내역서 1부.

3) 입찰결과 통보 공문 각 1부.

4) 계약포기서(단독응찰 업체) 1부.  끝.