안심․고품질 농수산물 유통의 선도기업

		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	청과동 경매장 환기개선 공사 시행

1. 『공사/도매시장법인 시설분야 소통 간담회 결과보고(시설관리팀-1727, ’22.06.29.)』와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련, 청과동 경매장 내 환기량 증대(급기휀 → 배기휀 전환)에 의한 쾌적한 실내환경 조성 및 영업환경 개선을 위해 「청과동 경매장 환기개선 공사」를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 청과동 경매장 환기개선 공사

나. 공사내용 : 급기휀 → 배기휀 전환(2대) 및 덕트 철거/재설치(덕트 제작 포함)

다. 공사기간 : 착공일로부터 21일

라. 소요금액 : 일금 일천삼백구십팔만 원정(\13,980,000, VAT포함)

마. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 도매시장관리원가, 수선유지교체비

바. 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	배정액	기 집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
기계시설유지보수	119,279	119,279	90,222	13,980	15,077	15,077

사. 계약방법 : 일반수의계약

아. 계약대상 : 비에이치이앤지(대표 : 강송민, HP *************)
주소 : 서울특별시 송파구 삼학사로4길 31,101호(석촌동)

붙 임 :	1.	공사개요	..................	1부
	2.	예정공정표	..................	1부
	3.	수의계약사유서	..................	1부
	4.	공공구매 대상 사전 검토서	..................	1부
	5.	산출기초조서	..................	1부
	6.	청렴계약이행서약서	..................	1부
	7.	부당계약특수조건 체크리스트	..................	1부
	8.	공사시방서	..................	1부
	9.	「도급인의 안전보건조치 사항」체크리스트	..................	1부
	10.	안전및보건확보의무이행서약서	..................	1부
	11.	수의계약 체결 제한 여부 확인서	..................	1부
	12.	견 적 서(별 첨)	..................	3부
	13.	도면(별첨)	..................	1부
	14.	사업자등록증(별첨)	..................	1부
	15.	통장사본(별첨)	..................	1부
	16.	간담회결과보고서(별첨)	..................	1부	. 끝.

★담당자						팀장				강서지사장		08/12
		김기수						임재근			이니세
협조자	차장		권유나

시행			시설관리팀-2159				(2022.08.12.)			접수				()
우	138-701			서울특별시 강서구 발산로 40								/	http://www.garak.co.kr
전화		02-2640-6035			전송	02-2640-6046		/	kim_kisu2002@garak.co.kr					/	공개

붙임#1

공   사   개   요

1. 공 사 명 : 청과동 경매장 환기개선 공사

2. 공사개요

1) 위    치 : 서울특별시 강서구 발산로 40(관리업무동)

2) 공사내용 : 급기휀 → 배기휀 전환(2대) 및 덕트철거/재설치(덕트제작 포함)

3) 공사기간 : 착공일로부터 21일간

4) 공사금액 : 일금 일천삼백구십팔만 원정(₩13,980,000, VAT포함)

3. 예산현황                                                  (단위 : 천원)

구 분	예산액	배정액	기 집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
기계시설유지보수	119,279	119,279	90,222	13,980	15,077	15,077

4. 관급자재 내역 : 없음

5. 설 계 자	소속	:	시설관리팀	직급	4급	성명	김 기 수
6. 설계심사자	소속	:	시설관리팀	직급	팀장	성명	임 재 근
7. 감 독 원	소속	:	시설관리팀	직급	4급	성명	김 기 수
	소속	:	시설관리팀	직급	4급	성명	강 봉 호
8. 검 사 원	소속	:	시설관리팀	직급	3급	성명	박 수 범

9. 기성고 지급횟수 :  없음

10. 하자보수보증금률 및 기간 : 계약금액의 2%, 2년

11. 지체 상금율 : 0.5/1,000

12. 설계서 열람장소 :  서울시농수산식품공사 강서지사 시설관리팀

붙임#2

예  정  공  정  표

1. 공 사 명 : 청과동 경매장 환기개선 공사

2. 공사기간 : 착공일로부터 21일간

3. 예정공정표

(단위 : 일)

일 정 공 종	착공일로부터 일정											비 고
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
현장조사 및 자재 작업준비
휀 및 덕트 철거
장비기초 설치
휀 및 덕트 설치
현장정리 및 준공

붙임#3

수 의 계 약 사 유 서

계약건명	청과동 경매장 환기개선 공사
소요예산	일금 일천삼백구십팔만 원정(₩13,980,000, VAT포함)
계약업체	비에이치이앤지 대표 강 송 민
담당자명 (직함포함)	강송민 사장	담당자연락처	*************
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부			“해당없음”
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호
수의계약 사유	본 공사는 추정가격이 2천만원 이하의 소액으로 수의계약에 의할 수 있는 금액이며, 본 계약건의 원가산출 및 견적가 비교결과 최저가격을 제시한「비에이치이앤지」와 수의계약을 체결하고자 함
금년도 현재까지 본 계약업체와 기 계약 요청된 건수 기재 (UNIS/계약관리/계약요청관리/행추가/거래처 입력 후 알림창에서 조회)			현재까지 총 ( 2 )회 ※ 이미 4회 계약 요청된 업체는 계약 불가
우선구매 해당사항 (모두선택)	□중기업제품 □사회적기업제품 □중증장애인생산제품 □소기업제품 □여성기업제품 □장애인기업제품 □친환경상품 □신기술제품 □기술개발제품 □협동조합․자활기업․마을기업 ■해당 없음

2022. 08. 12.

작 성 자  소속 시설관리팀  직급 4 급  성명 김 기 수

확 인 자  소속 시설관리팀  직급 팀장  성명 임 재 근

<별표 1>

	수의계약 배제사유
① 견적서 제출 마감일 현재 부도 · 파산 · 해산 · 영업정지 등이 확정된 경우 ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 시행령 제92조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰 ․ 계약 서류의 허위 ․ 위조 제출, 입찰 · 낙찰 · 계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 6개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자 ※ 기술자 보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지 2>의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다. ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰 ․ 계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자 ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자 ※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 시행령 제92조 제1항 제6호에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨. ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자) 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등 ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자 ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자 ⑩ 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만 원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만 원 이상 관급용역이 3건 이상인 자 (단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

붙임#4

공공구매 대상 사전 검토서

구매 대상	건명	청과동 경매장 환기개선 공사
	구분	■ 공사 □ 물품 □ 용역
	품명 및 규격			수량		금액		구매방법(공사, 용역의 경우)
								□직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재)
								□직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재)
								□직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재
공공 구매 여부	녹색제품 대상 확인	• 구매 대상이 녹색제품 대상에 해당되는지 여부( 예 / 아니요) • (다품목 구매의 경우)구매 대상인 녹색제품 대상인 것은? (제품명 기재) ※ 녹색제품에 해당하는 제품은 의무적으로 80% 이상 구매해야함
	직접생산증명서	• 직접생산증명서 소지 여부( 예/ 아니요) ※ 물품, 용역 계약만 기재
	제품구분	중소기업 제품	기술개발 제품		사회적 기업제품		중증장애인생산품		장애인기업제품	녹색 제품
	해당여부 (다품목일 경우 제품명 기재)
	검토결과 (미구매 사유)	○ 해당사항 없음
관련 규정	○ 서울특별시녹색재품구매촉진에관한조례」 및 「서울특별시녹색제품구매계약특수조건」 제3조(구매이행 준수의무)에 따라 계약상대자는 납품하여야할 품목이 녹색제품에 해당하는 경우 이를 구매하여 사용하거나 납품하여야 함 ○「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」(중소벤처기업부고시 제2017-23호) 제38조(중소기업제품 구매 절절성 검토의뢰 및 시기)에 따라 사업부서는 중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰서와 관계 서류를 첨부하여 구매지원관에게 검토 의뢰하여야 함 ○ 기타 공공구매 관련 법률에 의거 법정 비율 이상 공공구매 제품으로 구매해야 함

2022. 08. 12.

작성자 4급  김 기 수 (인)

확인자 팀장  임 재 근 (인)

붙임#5

산 출 기 초 조 서

(단위 : 원)

공 사 명	단위	수량	견적 1	견적 2	견적 3	적용금액
			㈜엔케이건설	삼성남부공조	비에이치이앤지
청과동 경매장 환기개선 공사	식	1	16,627,273	14,309,090	12,709,091	12,709,091
부가세	식	1	1,662,727	1,430,910	1,270,909	1,270,909
총 계			18,290,000	15,740,000	13,980,000	13,980,000

2022. 08. 12.

작 성 자  소속 시설관리팀  직급 4 급  성명 김 기 수

확 인 자  소속 시설관리팀  직급 팀장  성명 임 재 근

붙임#6

서울특별시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 [청과동 경매장 환기개선 공사]에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를  막론하고 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라  책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX   768-8846

2022년  08월 12일

계약부서	강서지사장 이 니 세 업무지원팀장 이 두 영 계약담당 권 유 나
발주부서	시설관리팀장 임 재 근 감독담당 김 기 수

붙임#7

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명	청과동 경매장 환기개선 공사
발주부서	부서명	시설관리팀	작성자	김기수	연락처	02-2640-6035
계약부서	부서명	업무지원팀	작성자	권유나	연락처	02-2640-6015
제출일자	2022. 08. 12.

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

붙임#8

공 사 시 방 서

1. 공사 개요

1) 공 사 명 : 청과동 경매장 환기개선 공사

2) 위    치 : 서울특별시 강서구 발산로 40(관리업무동)

2. 목  적

본 시방은 “청과동 경매장 환기개선 공사 ” 시행을 목적으로 한다.

3. 공사범위 : 급기휀 → 배기휀 전환(2대) 및 덕트 철거/재설치(덕트 제작 포함)

4. 적용범위

1) 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 시방서에 준한다.

2) 시방서에 없는 사항은 국토해양부 제정 “건축설비공사 표준시방서”에 따른다.

5. 적용순서

1) 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축 및 전기에 관한 사항은  해당분야의 표준시방서에 준한다.

2) 본 시방서와 표준시방서의 내용이 상이한 경우에는 본 시방서를 우선으로 한다.

3) 도면과 본 시방서가 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하는 것을 원칙으로 하되 감독관과 협의하여 정한다.

4)  본 시방서, 도면 또는 표준시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 경우 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고 그 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

6. 이 의

설계도서와 시방서의 내용이 서로 다를 때, 누락되거나 잘못 명기되었을 경우 또는 의문이 있을 때는 감독관과 협의한다.

7. 감독관

본 시방서에서 감독관이라 함은 본 공사의 수행을 지휘/감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사/시험하기 위하여 발주자가 임명한 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

8. 공정표

시공자는 착공에 앞서 “청과동 경매장 환기개선 공사” 일정을 반영한 공정표 및 기타 시공계획서 등을 작성/제출하고 감독관의 승인을 받는다.

9. 시공계획서

1) 시공자는 자재운반, 장비사용 및 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사 착수 전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

2)  시공계획서 중 특히 중량물의 반입 및 설치 등 위험을 수반하는 공사에  대하여서는 공사방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

10. 시공도

시공자는 현장사정에 따른 정확한 시공을 위하여 시공도 및 제작도를 작성/제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

11. 기기 및 재료

1) 기기 및 재료(기자재 및 부속품 포함)는 특기하지 않는 한 모두 KS규격의 신 품을 사용하여야 하며, KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다.

2) 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 KS사본 및 시험 성적서 등의 기술자료를 구비하여 제출하고, 감독관의 승인을 받아야 한다.

3)  기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을  명시 한 명판을 부착하되, 한국공업규격 또는 공산품 안전관리법의 규정에  적합한 것으로 한다.

12. 시 험

시공자는 감독관이 요구하는 품목에 대하여 국가공인기관에서 시행하는 항목시험을 필하고, 시험성적서를 감독관에게 제출하여야 한다.

13. 입회검사

기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등 감독관의 입회하에 조립 시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 사진(3 * 4) 2매를 제출한다.

14. 시공기준

설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 시공자는 충분히 검토 후에 모든 공사를 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락 및 오기에 대하여도 시공자는 무상으로 시공하여야 한다.

15. 대 관청 수속

1)  시공자는 공사 착수 전에 관계법규에 관한 허가 및 신고를 필해야 할 종류의 모든 사항을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다.

2)  시공자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항 일체를 지체없이 행하여야 하며 그 진행사항을 수시로  감독관에게 보고하여야 한다.

3) 허가수속 완료 후 관공서 및 기타 기관에서 발행된 인/허가서류 일체를 발주자에게 제출하여야 한다.

16. 공사현장 관리

1)  공사현장의 관리는 노동법 (근로기준법 및 근로안전관리규칙 등) 안전관리법, 환경보전법 및 기타 관계법규에 따라 이행하여야  한다.

2) 시공자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자는 풍기단속, 위생 관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해 및 위험물 취급에 대한 책임을 지며, 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

3) 현장 내에는 자격이 있는 안전관리기사를 두어 안전사고를 예방하여야  한다.

4) 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등의 관리에 철저를 기하여야 한다.

17 공사보고

시공자는 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입/출고, 각종검사 및 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일보고서를 작성/제출하여 감독관의 승인을 받아야 하며, 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 서류를 지체없이 제출하여야 한다.

18. 공사의 보전

1) 시공자가 발주자로부터 인수받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질 및 분실 등의 방지를 위하여 철저하게 보전하여야 한다.

2) 시공자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질 및 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.

19. 뒷정리

1) 보존을 요하는 배관, 덕트 및 장비에 대해서는 시공 전에 녹, 플라스터 및 먼지 등을 청소하여야 한다.

2) 도장을 할 배관 및 덕트 등은 와이어 브러쉬로 녹 및 플라스터를 제거하고  먼지 등을 걸레로 깨끗이 닦은 후 도장하여야 한다.

3) 현장에서 시공도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기 및 각종 폐품 등을 즉시 현장 밖으로 운반하여야 한다.

20. 준공서류

1) 시공자는 공사완료 시 준공도면을 작성하여 감독관의 검토 및 승인을 받은 후 제출하여야 한다.

2) 시공자는 공사착수 전 전경과 부분별 시공전경 및 공사 후 전경을 각 공정별로 촬영하여 준공사진첩(A4) 2부를 제작 후, 준공요청 시 사진파일과 함께 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 공사완료 후에는 인허가 서류, 시험성적서 및 자재수불증빙서 등 필요한 부속서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

21. 코로나 19 감염증 예방 및 확산방지

1) 공사 관련자(현장대리인 및 작업자 등)는 공사 전 반드시 발열체크/마스크 착용 및 소독제(공사현장 입구)를 비치하여야 한다.(공사일보에 발열 체크 및 특이사항 명기)

2) 기침 등 호흡기 증상자 및 특이사항 발현 시 현장대리인과 감독관에게 즉시 보고하여야 한다.

3) 코로나19 감염증이 의심될 땐 신고 및 상담 전화번호 : ☎1339, 02-120

4) 기타 문의사항 : 시설관리팀 차장 김기수(☎ 02-2640-6035)

붙임#9

「도급인의 안전보건조치 사항」체크리스트

사 업 명	청과동 경매장 환기개선 공사
발 주 처	부서명	시설관리팀		작성자	김기수	연락처	02-2640-6035
계약업체	비에이치이앤지		대표 또는 현장대리인		강송민	연락처	*************
계약기간	2022. 08. 00. ~ 2022. 09. 00. (계약후 작성)

구분	항 목	적 용 대 상		실시주기	실시 여부
					발주처	계약사
* 1	위험성평가 실시 [산안법 제36조]	○ 모든 (공사·물품·용역)은 위험성평가를 실시 - 단, 상시근로자수 20명 미만 사업장 (총 공사 금액 20억원 미만 건설공사) 위험성 추정 절차를 생략 가능 ※ 위험성 추정: 발생빈도×중대성을 수치화 ※ 붙임1) 위험성평가표에 작성		착공·착수 전	확인	실시
					Y/N ■□	Y/N ■□
* 2	도급사업의 안전·보건 조치 [산안법 제64조]	○ 도급인(감독자)는 작업장 순회점검을 실시하고 순회점검표를 기록 및 보관 - 공사·시설보수·구매설치 등: 2일 이상 - 그 외 과업: 7일 이상 ※ 붙임2) 작업장순회점검표에 작성		1) 건설업·제조 - 2일에 1회 이상	Y/N □■	-
				2) 그 외 - 주 1회 이상
* 3	도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 [산안법 제65조]	○ 아래 작업이 포함된 경우 안전·보건 정보 제공(문서시행) 여부와 수급인은 확인		착공·착수 전	Y/N □■	Y/N □■
		□ 폭발·발화·독성 등 노출 □ 유해 화학물질 설비 개조·철거 □ 질식·붕괴 위험 작업 ■ 해당없음
* 4	안전·보건교육 실시 [산안법 제64조] ※택일하여 작성	■일반	수급사는 교육 실시, 도급인 확인	착공·착수 전	확인	실시
					Y/N ■□	Y/N ■□
		□유해 위험	(특별교육 대상)※시행규칙 별표5 확인 ※ 붙임3) 안전보건교육결과
5	건설공사 재해예방기술지도 [산안법 제73조]	○ 공사금액 1억 이상 이면서, 공사기간 1개월 이상 ※ 제외: 안전관리자를 선임하여 전담하는 공사 ※ 증빙자료: 용역계약서, 세금계산서, 지도활동 결과서		착공·착수 전 (※건설공사만)	확인	실시
					Y/N □■	Y/N □■
6	도급사업의 합동 안전·보건 점검 [산안법 제64조]	○ 도급인과 수급인이 각2명 이상 구성하여 합동으로 작업장 안전·보건 점검 - 공사·시설보수·구매설치 등: 60일 이상 - 그 외 과업: 90일이상		1) 건설업 - 2개월에 1회 이상	Y/N □■	Y/N □■
				2) 그 외 - 분기에 1회 이상
7	안전 및 보건에 관한 협의체 [산안법 제64조]	○ 도급인 및 수급인이 참여하는 협의체 구성 ※ 적용대상: 사업기간 30일 이상 ※ 제외: 30일 이내 일시 작업, 연간 총 60일 초과하지 않는 간헐작업		월 1회 이상	Y/N □■	Y/N □■
관련규정	○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시), (※사업장 위험성평가에 관한 지침 제5조) ○ 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치), 동법 제65조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등) ○ 산업안전보건법 제66조(도급인의 관계수급인에 대한 시정조치), 동법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ○ 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

발 주 처(도급사)	서울시농수산식품공사	감독자	김기수	김기수
계약업체(수급사)	비에이치이앤지	대 표	강송민

붙임#10

안전 및 보건 확보 의무이행 서약서 본인은 귀 기관의 청과동 경매장 환기개선 공사 계약을 수행함에 있어 산업재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다. ｢산업안전보건법, 중대재해처벌법｣등 관련 법규를 준수하겠습니다. : 예 ( ○ ) : 아니오 ( ) (비에이치이앤지)는 본 사업을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 근로조건 이행확약서를 제출합니다. 2022 년 08 월 12 일 주 소 : 서울특별시 송파구 삼학사로4길 31,101호(석촌동) 업체명 : 비에이치이앤지 대표자 : 강 송 민 (인)
발주부서	시설관리팀	김 기 수	계약부서	업무지원팀	권 유 나

붙임#11

■ 이해충돌 방지제도 운영규정 [별지 제9호 서식]
수의계약 체결 제한 여부 확인서
• 해당하는 [ ]에 √ 표시를 합니다. (1쪽)
발주자	발주기관	서울특별시농수산식품공사 강서지사	발주부서	시설관리팀	발주날짜	‘22. 08. 12.
발주내용 : 청과동 경매장 환기개선 공사(급기휀 → 배기휀 전환(2대) 및 덕트 철거/재설치(덕트 제작 포함)	[○] 공사 [ ] 용역 [ ] 물품 [ ] 기타
수의계약 사유 : 본 공사는 추정가격이 2천만원 이하이며 본 계약건의 견적가 비교결과 최저가격을 제시함
계약상대자 (확인인)	성명	강송민	소속	비에이치이앤지	[○] 개인 [ ] 법인 [ ] 단체 [ ] 기타
연락처	*************	주소	서울특별시 송파구 삼학사로4길 31,101호(석촌동)
수의계약 체결 제한 확인사항
	발주기관의 소속 임원, 배우자, 임원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
②	계약 업무을 법령상·사실상 담당하는 공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
	발주기관(산하기관)의 감독기관 소속 임원, 배우자, 임원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
	발주기관(자회사)의 모회사 소속 임원, 배우자, 임원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
	상임위원회 위원의 국회의원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
	공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의 의원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
	부터 까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
	부터 부터 까지 어느 하나에 해당하는 사람과 특수한 관계의 사업자(공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 발행주식 총수의 100분의 30 이상, 출자지분 총수의 100분의 30 이상, 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체)에 해당하는가?	[ ] 예 [○] 아니오 [ ] 해당없음
「공직자의 이해충돌 방지법」제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다. 2022 년 08 월 12 일
비에이치이앤지	계약상대자(확인인)	강 송 민(서명 또는 인)
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]