문서번호	물재생과-5346
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
홍민표		강병수	10/08 채희정
협조	주무관		정은경
	주무관		김근수

폐기물 처리용역 준공기한 연기 보고

- 차집관거 성능개선 시설공사(2014년) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중랑물재생센터

물재생과

시설공사 폐기물 처리보고(물재생과-3195, 2014. 7. 16)에 따라「차집관거 성능개선 시설공사(‘14년)」에서 발생하는 건설폐기물을 포함 처리하는『청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역(한양여대앞)』준공기한(2014.10.31.) 도래에 따라 시설공사 준공기한(2014. 12. 31)에 맞춰 폐기물 처리용역 준공기한을 연기 시행코자 함.

폐기물 처리용역 준공기한 연기 보고

1		계약 현황

○ 공     사

가. 공 사 명 : 차집관거 성능개선 시설공사(‘14년분)

나. 도 급 비 : 905,459천원

다. 계약업체 : 서일종합건설(주)

라. 공사기간 : 2014. 05. 29 ～ 2014. 12. 31.

○ 용     역

가. 용 역 명 : 청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역(한양여대앞)

나. 용 역 비 : 86,444천원

다. 계약업체 : 남부이엔티(주), 삼흥산업개발(주)

라. 용역기간 : 2014. 03. 31 ～ 2014. 10. 31.

2		보고내용

가. “시설공사 폐기물 처리보고(물재생시설과-3195, 2014. 7. 16)”에 따라「2014년      차집관거 성능개선 시설공사」중 발생 건설폐기물을 조기처리하기 위해 6월말       기성준공 완료한 “한양여대앞 차집관거 이설공사”와 관련 분리발주 계약된『청계천      하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역(한양여대앞)』에 포함 처리 시행중

나.『청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역(한양여대앞)』준공기한일 2014. 10. 31       도래에 따라 현재 시행중인 “차집관거 성능개선 시설공사” 준공기한일 2014. 12. 31에 맞춰       폐기물처리용역 준공기한 연기가 필요한 실정임.

- 폐기물 처리용역 준공기한 변경

· 당초 : 2014. 3. 31 ~ 10. 31.

· 변경 : 2014. 3. 31 ~ 12. 31.

- 지체상금 부과 검토

· 연기사유 귀책소재 : 중랑물재생센터

· 지체상금 부고여부 : 미부과

3		조치내용

○ 2014년 차집관거 성능개선 시설공사에서 발생 폐기물 처리용역『청계천 하류횡단 차집관거 폐기물 처리용역(한양여대앞)』준공기한 연기  처리코자함.

붙 임 : 시설공사 폐기물처리 보고(방침서) 1부.  끝.