문서번호	설비공사팀-1277			★담당자	팀장		건설안전본부장			사장
보존기간	년										12/21
				권성진	정우철		임창수			문영표
결재일자	2022.12.21.
공개여부	공개
				협 조
					팀장				강성규
					부장				안탁
					부장				김선길
				감 사	감사실				감사필
가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치 시행

2022. 12.

	서울특별시농수산식품공사
설비공사팀

가락시장 채소2동 수배전반제작 구매설치 시행(요약)

채소2동 관급자재 『특정제품 선정심사위원회』를 통해 선정된 수배전반

설비 조달우수제품(1순위)을 구매하여 품질확보 및 적기 납품하고자 함

□ 사업 개요

○ 사업내용:배전반 30면(고압반 6면, 변압기반 6면, 저압반 18면) 동력제어반(MCC) 12면

○ 발주예산: 1,306백만원(사업비 1,488백만원)

○ 업체선정방식: 특정제품선정 심사위원회를 통한 조달우수제품 수의계약

□ 설계 도서 변경(업체 제안사항 반영)  ※ 11.22 특정제품선정 심사위원회 완료

○ 조달우수제품 6개사 평가결과 1순위로 선정된 ㈜스마트파워의 제안 사항 반영

【 주요 변경 내용(1순위 업체 제품으로 설계도서 보완) 】

구분		설계	제안	변경
화재 감시	수배전반	미적용	24대	- 복합적인 화재원인 실시간 검출 - 화재 예방 및 차단이 가능
내진	내진베이스	미적용	254개	- 지진 시 내진장치, 상태모니터링
전류 차단	수배전반 D.Z.R.C 등	0대	87대	- 합선에 의한 순시전류 및 한시전류, 과전류 보호기능
아크제거기		0대	6대	- 저압부 아크 발생 시 보호
고효율 몰드변압기		6대(표준 몰드)	6대(고효율 몰드변압기)	- 고조파 전류 저감 변압기(K-FACTOR7) 채택을 통해 고조파로 인한 발열 및 소손 방지
하자 보수		2년	10년 (수배전반설비)	- 10년 무상 품질서비스 제공 (예비 부품류 1% 공급/2시간이내 A/S)
발주 금액		1,650백만원 (사업비1,488백만원)	1,306백만원	- 사업비 182백만원 절감

□ 수배전설비 계약 시행 : 조달우수제품 수의계약(총액계약)

○ 계약업체:（주)스마트파워(대표 : 박기주, 경기 김포시 대곶면)

○ 소요예산: 1,306,605,000원(부가세 포함)

○ 계약기간: 착수일로부터 ‘23.12.29.까지(전기공사 준공일까지)

보고자	건설안전본부장 : 임창수 ☎ 0506	설비공사팀장 : 정우철 ☎ 0300	담당 :권성진 ☎ 0304

가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치 시행

채소2동 관급자재 수배전반 설비 발주계획에 따라『특정제품선정

심사위원회』를 통해 선정된 조달우수제품(1순위)을 구매하여 품질확보 및

적기 납품하고자 함

Ⅰ		사업 개요

▢ 사업명 : 가락시장 채소2동 수배전반 제작구매 설치

▢ 사업내용: 배전반 30면(고압반 6면, 변압기반 6면, 저압반 18면)

동력제어반(MCC) 12면(지열설비 9면, 소방설비 3면)

▢ 발주 예산 : 1,306백만원(사업비 1,488백만원)

▢ 업체 선정 방식 : 특정제품선정 심사위원회를 통한 조달우수제품 수의계약

Ⅱ		그동안의 추진 경과

▢ 채소2동 태양광, 수배전반 사전 설명회(설비공사팀-1070호, ‘22.11.09.)

○ 조달우수제품 선정을 위한 특정제품 선정위원회 등 절차 안내

○ 제안요청서, 제안서 작성기준, 설계도서 사전 검토 및 업체 의견 수렴

▢ 채소2동 관급자재(수배전반 설비) 발주 계획 수립(설비공사팀-1074호, ‘22.11.10.)

○ 품질․성능․기술 확보를 위한 발주방법 검토 및 확정(조달우수제품 구매)

○ 특정기술선정 심사위원회 개최를 통한 공정성․투명성 확보

▢『특정기술 선정심사위원회 개최 시행』(설비공사팀-1098호, ‘22.11.16.)

○ 평가일 : 11.22(화)

○ 평가방법: 위원(6명) 평가 후 합산(기술 50점, 가격 50점)

▢『특정제품 선정심사위원회 결과보고』(설비공사팀-1134호, ‘22.11.25.)

○ 참여 업체: 수배전반 설비 우수조달 업체 6개사

○ 1순위 업체: ㈜스마트파워(대표: 박기주)

Ⅲ		설계도서 변경(제안사항 반영)

▢ 변경 사유

11.22(화) 시행한 수배전반 설비 특정제품선정 심사위원회에 제안한 조달

우수제품 6개사 평가결과 1순위로 선정된 업체 제품으로 설계도서 보완

▢ 변경 내용(당초 설계도서 대비 동등이상)

구분

설계

제안

변경

복합화재감시장치

수배전반

미적용

12대

- 불꽃·가스·연기·온도·전류·습도

복합적인 화재원인 실시간 검출

- 화재 예방 및 차단이 가능

MCC반

미적용

12대

복합내진 장치

배전반 내진베이스

미적용

30면

- 지진 시 3축 내진장치, 고감도

복합센서로 설비보호

- 실시간 상태모니터링

(리히터 8.0 견딤)

- 전기설비에 대한 내진설계 의무

규정 확대

[내진장치]	[내진센서]

MCC 내진베이스

미적용

20면

배전반 내진장치

미적용

120개

MCC 내진장치

미적용

80개

내진센서

미적용

4대

과도

선택 전류

차단

수배전반 D.Z.R.C

0대

5대

- 합선에 의한 순시전류 및

한시전류, 과전류 보호기능

수배전반 Z.R 등

0대

82대

양압

기술

솔루션

배전반 양압생성유지장치

0set

30set

- 양압유지를 통해 수배전반

수명 2대 증대

- 미세먼지,습기 등 전자열전

결로예방 알고리즘

MCC 양압생성유지장치

0set

12set

아크제거기

0대

6대

- 저압부 아크 발생 시 변압기

보호, 인체 보호 예방

고효율 몰드변압기

6대(표준 몰드)

6대(고효율 몰드변압기)

- 고조파 전류 저감 변압기(K-FACTOR7) 채택을 통해 고조파로 인한 발열 및 소손 방지

하자 보수

2년

10년

(수배전반설비)

10년 무상 품질서비스 제공

(예비 부품류 1% 공급/2시간이내 A/S)

발주 금액

1,650백만원

(사업비1,488백만원)

1,306백만원

사업비 182백만원 절감

Ⅳ		수배전반 설비 구매 설치 시행

▢ 건명: 가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치

▢ 구매개요

▪배전반 30면(고압반 6면, 변압기반 6면, 저압반 18면) ▪동력제어반(MCC) 12면(지열설비 9면, 소방설비 3면)

▢ 소요예산 : 1,306,650,000원(부가세 포함)

※ 조달수수료 별도: 6,271,920원

▢ 납품기간: 착수일로부터 ‘23.12.29.까지(전기공사 준공일까지)

▢ 계약방법 : 총액계약(조달우수제품 수의)

○『지방계약법 시행령 제 25조』에 의거 조달우수제품으로 지정․고시된 제품

○『조달사업법 시행령 제 30조』에 의거 우수조달 인증을 받은 업체로서 계약일 현재 인정기간이 유효한 업체 제품

▢ 계약업체:（주)스마트파워(대표: 박기주, 경기도 김포시 대곶면)

○ 제 품 명: 양압배전반/ 조달우수제품 인증(제2022190)

◆ 선정사유 : 특정제품선정 심사위원회 제안서평가 결과 1순위 업체

◆ 조달우수제품 지정번호 및 기간: 2022190(‘22.10.24. ~ ‘25.10.23.)

◆ 담 당 자: 전무 성동준(TEL. 02-6735-3304)

▢ 예산과목: 시설현대화사업[자본적지출-유형자산취득-건설중인자산]

▢ 예산현황(설계관리팀)

(단위: 천원)

구분	예산액	기 집행액	금회집행액	예산잔액	비고
국고보조금	3,902,665	1,838,387	391,995	1,672,283	30%
시보조금	3,902,665	1,838,387	391,995	1,672,283	30%
융자금	5,203,220	2,451,182	522,660	2,229,378	40%
합 계	13,008,550	6,127,956	1,306,650	5,573,944	100%

붙 임	1.	구매개요	.....	1부.
	2.	예정공정표	.....	1부.
	3.	물품구매 내역서	.....	1부.
	4.	수의계약 사유서	.....	1부.
	5.	일상감사 요청서	.....	1부.
	6.	청렴계약이행서약서	.....	1부.
	7.	부당계약특수조건 체크리스트	.....	1부.
	8.	공공구매 사전검토서	.....	1부.
	9.	안전보건조치 체크리스트	.....	1부.
	10.	모범거래모델 자율점검사업부서 체크리스트	.....	1부.
	11.	건설사업관리단 검토의견서	.....	1부(별첨)
	12.	설계 도서(제안서, 도면, 시방서, 우수조달규격서)	.....	1부(별첨).끝.

붙임 1

구  매  개  요

1. 건       명: 가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치

2. 구 매 개 요

가.	구 매 내 용: 수배전반 및 MCC
• 수배전반 설비 배전반 30면(고압반 6면, 변압기반 6면, 저압반 18면) • 동력제어반(MCC) 12면(지열설비 9면, 소방설비 3면)
나.	소요예산 : 1,306,650,000원(부가세 포함)
다.	납품기간 : 계약일로부터 ‘23. 12. 29.까지
라.	예산현황

(단위: 천원)

구분	예산액	기 집행액	금회집행액	예산잔액	비고
시설현대화사업 국고보조금	3,902,665	1,838,387	391,995	1,672,283	30%
시설현대화사업 시보조금	3,902,665	1,838,387	391,995	1,672,283	30%
시설현대화사업 융자금	5,203,220	2,451,182	522,660	2,229,378	40%
합 계	13,008,550	6,127,956	1,306,650	5,573,944	100%

3.	감독자소속:	설 비 공 사 팀	직급 3급	성명 :	권 성 진	(인)
4.	검사자소속:	설 비 공 사 팀	직급 팀장	성명 :	정 우 철	(인)
		설 비 공 사 팀	직급 4급	성명 :	김 선 길	(인)
5.	기성고지급회수 :	필요시 지급(선금 포함)
6.	하자보수보증금률 및 기간:	계약금액의 3 / 100, 10년 ※ 하자보수기간 10년: 계약상대자의 제안사항
7.	지연배상금률:	0.8 / 1000
8.	설계서연람장소:	없음
9.	현장설명:	없음

붙임 2

예  정  공  정  표

1. 건    명: 가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치

2. 납품기간 : 계약일로부터 ‘23. 12. 29.까지

3. 예정공정표

구 분	‘23년												비고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
착수계 제출
설계 및 승인
외함 장비 제작
자재 발주
부스바 가공, 배선
MCCB 및 배선/조립
납품설치
사용전 검사/시운전
수전/현장정리

붙임 3

설 계 내 역 서

1. 건    명: 가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치

2. 납품기간: 계약일로부터 ‘23.12.29까지

3. 소요예산: 1,306,650,000원

4. 세부내역서

붙임 4

수 의 계 약 사 유 서

계약건명	가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치
소요예산	일금 1,306,650,000원
계약업체	㈜스마트파워(대표: 박기주)
담당자명 (직함포함)	전무 성동준	담당자연락처	02-6735-3304 *************
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부			“해당없음”
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제6호
수의계약 사유	① ㈜스마트파워는 조달우수제품 대상으로 개최한 특정제품선정 심사위원회의 제안서 평가결과(기술 및 가격평가) 1순위 업체(제품)로 선정되었으며, ② 본 건은 조달우수제품 구매‧설치 건으로 지방계약법 시행령 제 25조 제 1항 제 6호에 의거 수의계약이 가능하고, ③ 전기공사업법 제4조에 의거 전기공사업으로 등록되어 수배전반 설비 구매‧ 설치가 가능한 ㈜스마트파워를 수의 계약(조달우수제품 총액계약) 대상자로 선정함.
금년도 현재까지 본 계약업체와 기 계약 요청된 건수 기재 (UNIS/계약관리/계약요청관리/행추가/거래처 입력 후 알림창에서 조회)				현재까지 총 (0)회 ※ 이미 4회 계약 요청된 업체는 계약 불가
우선구매 해당사항 (모두선택)	■중기업제품 □사회적기업제품 □중증장애인생산제품 □소기업제품 □여성기업제품 □장애인기업제품 □친환경상품 □ 신기술제품 ■기술개발제품 □협동조합․자활기업․마을기업 □해당 없음

붙임 5

일 상 감 사 요 청 서

건 명	가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치
1. 사업개요 가. 사업근거 ○ 채소2동 관급자재(수배전반) 발주계획 수립(설비공사팀-1074호, ‘22.11.10) ○『특정제품 선정심사위원회 결과보고』(설비공사팀-1133호, ‘22.11.25) 나. 사업내용: 채소2동 관급자재[수배전반 설비] 제작 구매․설치 ○ 수배전반 설비 배전반 30면(고압반 6면, 변압기반 6면, 저압반 18면) ○ 동력제어반(MCC) 12면(지열설비 9면, 소방설비 3면) 다. 사업기간 : 계약일로부터 ‘23. 12. 29.까지 라. 소요금액 : 1,306,650,000원 마. 계약방법 : 조달청 총액계약(조달우수제품)
2. 자체 검토의견 가. 추진배경 ○ 가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사 관급자재 수배전반 설비 수급시기 도래 나. 사업의 필요성 ○ 채소2동 건립공사 관급자재(수배전반 설비) 적기 수급 및 설치 다. 검토내용 ○ 조달청 나라정터 발주 사례 및 조달우수제품 구매 관련 법령 검토 ○ 수배전반 설비 설계 도서 변경 내용 검토 다. 사업의 적정성(관련 규정 검토) ○ 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) - [조달사업법 시행령 제30조]에 따라 우수조달제품으로 지정․고시된 제품 ○ 서울시 특정제품 선정위원회 구성 및 운영에 관한 조례(제8275호) 마. 기대 효과 ○ 관급자재 수배전반 설비의 공정한 업체 선정 ○ 수배전반 설비의 품질 확보 및 원활한 공사 진행, 공기 준수

붙임 6

서울특별시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 (가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치)에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를  막론하고 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라  책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX   768-8846

2022.    11.

[서울시농수산식품공사]	사 장	문 영 표	(서명 또는 날인)
[계약부서]	경 영 본 부 장	서 성 만	(서명 또는 날인)
	재 무 팀 장	설 석 호	(서명 또는 날인)
	계 약 담 당	안 탁	(서명 또는 날인)
[발주부서]	건설안전본부장	임 창 수	(서명 또는 날인)
	설 비 공 사 팀 장	정 우 철	(서명 또는 날인)
	발 주 담 당	권 성 진	(서명 또는 날인)

붙임 7

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명	가락시장 채소2동 수배전반 설비 제작 구매 설치
발주부서	부서명	설비공사팀	작성자	권 성 진	연락처	02-3435-0304
계약부서	부서명	재 무 팀	작성자	안 탁	연락처	02-3435-0381
제출일자	2022. 12.

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

붙임 8

공공구매 대상 사전 검토서

구매 대상	건명	가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치
	구분	□ 공사 ■ 물품 □ 용역
	품명 및 규격			수량	금액			구매방법(공사, 용역의 경우)
	가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치			1식	1,306,650,000원			■직접구매(관급자재) □간접구매(도급자재)
공공 구매 여부	녹색제품 대상 확인	• 구매 대상이 녹색제품 대상에 해당되는지 여부( 예 / 아니요) • (다품목 구매의 경우)구매 대상이 녹색제품 대상인 것은? (제품명 기재) ※ 녹색제품에 해당하는 제품은 의무적으로 80% 이상 구매해야함
	직접생산증명서	• 직접생산증명서 소지 여부: 있음
	제품구분	중소기업 제품	기술개발 제품			사회적 기업제품	중증장애인생산품		장애인기업제품	녹색 제품
	해당여부 (다품목일 경우 제품명 기재)	○	○
	검토결과 (미구매 사유)	○ 해당사항 있음
관련 규정	○ 서울특별시녹색제품구매촉진에관한조례」 및 「서울특별시녹색제품구매계약특수조건」 제3조(구매이행 준수의무)에 따라 계약상대자는 납품하여야할 품목이 녹색제품에 해당하는 경우 이를 구매하여 사용하거나 납품하여야 함 ○「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」(중소벤처기업부고시 제2017-23호) 제38조(중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰 및 시기)에 따라 사업부서는 중소기업제품 구매 적절성 검토의뢰서와 관계 서류를 첨부하여 구매지원관에게 검토 의뢰하여야 함 ○ 기타 공공구매 관련 법률에 의거 법정 비율 이상 공공구매 제품으로 구매해야 함

2022. 12.

붙임 9

「도급인의 안전보건조치 사항」체크리스트

사 업 명	가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치
발 주 처	부서명	설비공사팀	작성자	권성진	연락처	02-3435-0304

NO	항 목	적 용 대 상	실시주기	해당 여부
1	안전 및 보건에 관한 협의체 [산안법 제64조]	- 도급인 및 수급인이 참여하는 협의체 구성 ※ 적용대상: 사업기간 30일 이상 ※ 제외: 30일 이내 일시 작업, 연간 총 60일 초과하지 않는 간헐작업	월 1회 이상	Y/N ■□
2	도급사업의 합동 안전·보건 점검 [산안법 제64조]	- 도급인과 수급인이 각2명 이상 구성하여 합동으로 작업장 안전·보건 점검 ※ 적용대상: 사업기간 90일이상	1) 건설업 - 2개월 1회 이상	Y/N ■□
			2) 그 외 - 분기 1회 이상
3	도급사업의 안전·보건 조치 [산안법 제64조]	- 도급인(감독자)는 작업장 순회점검을 실시하고 순회점검표를 기록 및 보관 ※ 적용대상: - 공사·시설보수·구매설치 등: 2일 이상 - 그 외 과업: 7일 이상 ※ 붙임1) 작업장순회점검표에 작성	1) 건설업·제조 - 2일에 1회 이상	Y/N ■□
			2) 그 외 - 주 1회 이상
4	도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 [산안법 제65조]	- 아래 작업이 포함된 경우 안전·보건 정보 제공(문서시행) 여부와 수급인은 확인	착공·착수 전	Y/N ■□
		□ 폭발·발화·인화·독성 등 유해 화학물질 설비 개조·철거 □ 질식·붕괴 위험 작업
5	위험성평가 실시 [산안법 제36조]	- 모든 (공사·물품·용역)은 위험성평가를 실시 - 상시근로자수 20명 미만 사업장(총 공사금액 20억원 미만 건설공사)의 경우에는 위험성 추정 절차를 생략 가능 ※ 위험성 추정: 발생빈도+중대성을 수치화 ※ 붙임2) 위험성평가표에 작성	착공·착수 전	Y/N ■□
관련규정	○ 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) ○ 산업안전보건법 제65조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등) ○ 산업안전보건법 제66조(도급인의 관계수급인에 대한 시정조치) ○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시), (※사업장 위험성평가에 관한 지침 제5조) ○ 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

2022. 12.

붙임 10

「모범거래모델 자율점검」사업부서 체크리스트

건 명: 가락시장 채소2동 수배전반 제작 구매 설치

번호	모범거래모델 자율점검 사항	해당유무
		유	무
1	지방공기업(공급자, 임대인)이 일방적으로 공급이나 임대차 계약을 종료할 수 있도록 하는 규정을 두고 있는지 여부?		●
2	소비자나 임차인에게 과도한 위약금·연체료를 부담시키는 규정이 있는지 여부?		●
3	입찰참가 자격을 특정한 면허 소지한 자로 과도하게 제한하거나 입찰자격이나 평가에 과도한 실적이나 인증을 요구하고 있는 여부?		●
4	긴급입찰의 사유가 명확하지 않음에도 긴급입찰로 진행해 단축된 입찰기간을 적용하고 있는지 여부?		●
5	경쟁입찰 대상사업에 있어 대체품이 있거나 대체품 유무여부를 확인하지 않고 수의계약을 추진하고 있는지 여부?		●
6	사업 요구인력의 요건이나 인원이 사업내용 및 규모에 비해 과도하게 설정되어 있는지 여부?		●
7	경쟁입찰에서 특정규격의 제품을 연상시키거나 특정규격 기능을 요구하고 있는지 여부?		●
8	입찰 담합 방지를 위한 조치를 취하거나, 방지방안을 고려하여 시행하는지 여부?	●
9	원·하도급관계가 형성되지 않도록 원칙적으로 주계약자 공동도급 활용을 먼저 검토했는지 여부?	●
10	입찰·계약 등 모범거래모델 준수여부를 판단하기 위한 체크리스트 작성했는지 여부?	●

2022 .  12.

부서명: 설비공사팀  직급: 4급  성명:  권 성 진 (인)

결재의견 페이지(반드시 마지막 페이지에 넣고 해당 안내 문구 삭제!)

결재의견입력부