아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 검토 및 승인 알림(서서울미술관 건립공사))

1.업무지시현장 : 서서울미술관 건립공사(장기1차) 이에스아이 주식회사, 서서울미술관

건립공사(장기1차) (주)건축사사무소광장

2.작 성 일 자 : 2023-01-13 10:01:20

3.지 시 내 용 :

가. 광장(서서울) 2023-113호(2023.1.9.)와 관련입니다.

나. 우리 본부에서 진행중인「서서울미술관 건립공사」와 관련 사토장 변경(추가) 실정보고에 대하여 우선 승인 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며, 추후 설계변경 소위원회에서 금액이 확정됨을 알려드립니다.

다. 아울러, 사토반출 관련 규정에 따라 지정된 사토장에만 사토를 반출하시기 바라며, 남은 물량에 대하여서는 추가 사토 반출기간이 도래하기 전까지 지속적으로 검토하시어 보고해주시기 바랍니다.  끝.

주무관	최진규		환경시설과장	최장길		건축부장	01/13
이형재
협조자	주무관	이제관
시행	건축부-749	(	2023. 1. 13.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	cjk3825@seoul.go.kr	/	부분공개(5)