문서번호	토목부-19907
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	10/14 노우성

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

종단 조정에 따른 기존 아파트 출입문 등 교체  보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

종단 조정에 따른 기존 아파트 출입문 등 교체 보고

도로확장에 따른 종단구배 조정으로 단차가 발생(30cm)한 기존 아파트(한강포스파크) 후문 출입구 교체 및 단지내 보도 재포장 등에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜한국관리공사

추진경위

○ 2011.10. : 방음벽 설치에 대한 아파트측 의견 제출(촘촘한 출입문외 6건 요구)

○ 2012. 6. : 발주처 협의후 민원처리부 전달

○ 2012. 7. : 주민동의후 방음벽 공사 시행

○ 2013.12. : 아파트출입문 설치 1차 협의

○ 2014. 2. 7. : 2차 협의(출입문 2.4m와 출입문 위 방음판 설치, 단지내 보도블럭 포장 요구)

○ 2014. 2.18. : 3차 협의(출입문 1.8m와 단지내 보도블럭 포장 요구)

보고내용

○ 아리수로 기존도로 확장 및 인하에 따라 한강포스파크 아파트 후문 출입구 단차가 발생(30cm)되어 기존 게이트 및 기초콘크리트 철거가 필요한 실정임.

○ 아파트측에서는 2.4m슬라이딩 게이트와 출입문 위 방음판, 보도블럭 교체, 조경수 식재 등을 요청하였으나, 아파트측과 몇차례에 걸친 협의 결과 아래와 같이 협의되어 실정보고 하는 사항임.

- 협의결과(아파트 ↔ 본부)

구 분	아파트 요구(안)	본부(안)	합의(안)
출입문 높이	2.4m 슬라이딩 게이트	1.8m 슬라이딩 게이트	1.8m 슬라이딩 게이트
출입문 위 방음판 설치	출입문 위 방음판 설치 요청	미 설치	미설치
단지내 보도블럭 교체 및 조경수 식재	단지내 보도블럭 교체 및 조경수 식재 요청	보도블럭 포장 (A=145㎡)	보도블럭 포장 (A=145㎡)
아파트 명판 설치	아파트 명판 설치	수용	수용

공사비 증·감 내역

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	식	-	22,537	22,537
제 경 비	식	-	1,563	1,563
공 급 가 액		-	24,100	24,100
부 가 세	식	-	2,410	2,410
도급공사비		-	26,510	26,510
관급자재비	식	-	4,776	4,776
폐기물처리비		-	586	586
총 공 사 비		-	31,872	31,872

감리단 검토의견

○ 도로종단조정으로 한강포스파크 아파트구간 기존도로 인하에 따른 단차발생으로 해당 아파트 구간 방음벽공사를 위해 2011년～2012년 아파트측과 수차례 협의 후 방음벽 공사를 완료 함.

○ 당시 협의사항 이행을 위해 2013년 말 ～ 2014년 재 협의시 현장 실정에 맞게 협의‧조정하여 아파트 출입문 설치공사 등을 하고자하는 사항으로 ‘공사계약일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경 3.현장상태에 따른 설계변경 및 5.발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 함이 적정하다고 사료됨.

조치계획

○ 한강포스파크 후문 출입구 게이트 교체 및 단지내 보도재포장은 아리수로 도로확장 및 인하로 인하여 발생된 상황이므로 감리단 의견과 같이 승인하고 추후 설계변경에 반영이 필요함.

- 추가공사비 31,872천원

붙 임 : 1. 감리 검토의견서 1부.  끝.